“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 준공기한 연기에 따른 변경계약 의뢰

1. 경제정책과-18519(2016.12.2.)호와 관련입니다.

2. 우리부서에서 시행하고 있는「(가칭)로봇과학관 건립 타당성조사」용역에 대하여 아래와 같이 준공기한 변경계약을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : (가칭)로봇과학관 건립 타당성조사

나. 계약업체 : *********************

다. 계약금액 : ************************

라. 변경사항 : 준공기한 연기(금액 변경없음)

구분	당 초	변 경	증‧감
계약금액	81,500,000원	81,500,000원	변동없음
계약기간	’16. 7. 27 ~ ’16. 12. 26	’16. 7. 27 ∼ ’17. 2. 25	60일 연장

붙임  1. 준공연기 검토보고서 1부

2. 준공기한 연기의뢰서 1부

3. 합의각서 1부.  끝.

	경제정책과장
주무관	한유리		로봇과학관팀장	김현준		경제정책과장	12/02 김태희
협조자
시행	경제정책과-18534	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 경제정책과	/	http://economy.seoul.go.kr/
전화		/전송	2133-0703	/		/	부분공개(5,6)