문서번호	도시철도설비부-13350
결재일자	2016.12.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	송변전과장	도시철도설비부장
고명규	代김흥정	12/02 정찬웅

『 지하철9호선 연장건설(3단계) 2구간 』 전차선공사(1차) 설계변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

『지하철 9호선 연장건설(3단계) 2구간』

전차선공사(1차) 설계변경 검토보고

『서울지하철 9호선 연장건설(3단계) 2구간 전차선공사(1차)』시행중 토목분야(922, 923공구) 본선 터널공사 지연으로 인한 시공계획 변경에 따른 설계변경 검토 보고임.

관련근거

○ 지방계약법 시행령 제74조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

○ 내역변경에 따른 설계변경 검토결과 보고(서지9-3 시감 제16-390호, `16.11.29)

공사개요

○ 공 사 명 : 서울지하철 9호선 연장건설(3단계) 2구간 전차선공사(1차)

○ 위    치 : 올림픽공원 남4문 앞(935정거장) ~ 보훈병원 앞(938정거장)

○ 규    모 : 연장 4.9km, 강체전차선로(AL T-Bar) 10.9km

○ 공사기간 : `15. 8. 24 ~ `17. 3. 31(총차 : `15. 8. 24 ~ `18. 2. 8)

○ 계약금액 : 1,500,000,000원(총차 : 4,540,944,500원)

○ 계 약 자 : 현창전기(주) 이상규외 1개사(공동도급)

변경내용

○ 물량 변경내역

공 종	단 위	변 경 전	변 경 후	증·감	비 고
지지금구	개소	1,359	1,531	＋ 172
AL T-Bar	M	4,779	5,000	＋ 221
지지애자	개소	1,359	1,500	＋ 141
ANCHORING	개소	23	27	＋ 4

○ 공사비 변경내역

구 분	변 경 전	변 경 후	증·감	비 고
합 계	1,500,000,000원	1,500,000,000원	증·감없음
재 료 비	399,155,997원	435,304,188원	＋ 36,148,191원
노 무 비	694,664,921원	753,612,275원	＋ 58,947,345원
재 경 비	406,179,082원	311,083,537원	－ 95,095,545원

책임감리원 검토결과

○ 9호선 3단계 2구간 토목분야(922, 923공구) 본선 터널공사 지연됨에 따라,

○ 후속 공정인 전차선공사도 지연이 되므로, 구간별 시공물량을 변경 및 조정하여

계약금액 변경없이 설계 변경함이 타당함.

조치의견

○ 9호선 3단계 2구간 전차선공사의 효율적인 공정관리와 원활한 사업진행을

위하여,

○ 계약금액 변경없이 1차 공사 내역서의 시공물량을 변경 및 조정하여 설계

변경 시행코자 함.

붙임 : 1. 책임감리원의 내역변경에 따른 설계변경 검토결과 1부.

2. 9호선 3단계 2구간 전차선공사 변경내역서(1차 1회).  끝.