문서번호	공동주택과-22308
결재일자	2016.12.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	공동주택계획팀장	공동주택과장		주택건축국장
강창호	신동권	진경식		전결 12/02 정유승
협 조
	주무관		김유신

『공동주택 리모델링 기본계획 수립용역』

설계변경(용역기간 연장 등) 시행계획

2016. 12.

주택건축국

(공동주택과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

공동주택 리모델링 기본계획 수립용역』

설계변경(용역기간 연장) 시행계획

당초「공동주택 리모델링 기본계획」을 ’16.12.06.까지 수립할 예정이었으나, 도시계획위원회 소위원회 자문 결과를 반영하여 본위원회 재상정하기 위해 용역기간을 연장하는 설계변경을 시행하고자 함

□ 용역개요

○ 용역명 : 공동주택 리모델링 기본계획 수립용역(장기계속)

○ 용역기간

- 총 차 : ’14.07.11. ~ ’16.12.06.

- 1 차 : ’14.07.11. ~ ’15.02.05. (1차 용역 준공)

- 2 차 : ’15.02.06. ~ ’16.12.06.

○ 용역비

- 총 차 : 418,000,000원 (1차 : 131,000,000원, 2차 : 287,000,000원)

○ 용역업체 : ㈜ 미래이엔디 – 대표계약자

(공동도급자 : ㈜비엠도시건축사사무소, (사)한국도시설계학회)

○ 주요 추진경위

- ‘14.07.11. : 용역착수

- ’16.05.26. : 공람공고

- ’16.06.21. : 시 의회의견청취

- ’16.09.07. : 도시계획위원회의 심의

**********************************

*************************************

***************************************************

********************************************

**********************************

***************************************************************

□ 주요과업내용

○ 기초조사 및 리모델링 수요 예측

- 리모델링 대상 공동주택 현황 조사 및 세대수 증가형 리모델링 수요 예측

- 일시집중 방지 등을 위한 단계별 리모델링 시행방안

○ 세대수증가 및 증축형 리모델링에 따른 도시관리방안 제시

- 세대수 증가에 따른 기반시설에의 영향 검토, 특정지역의 기반시설 영향 검토

○ 노후 공동주택의 유지관리 방향 제시

- 공동주택 저에너지·장수명화 방안 마련 및 리모델링 지원 방안 제시

□ 설계변경(안)

○ 설계변경 내용

구분	변경전	변경후	비고
용역기간	(총차) 2014.07.11.~ 2016.12.06. ※ 2차(’15.02.06.~’16.12.06.)	(총차) 2014.07.11.~ 2016.12.30. ※ 2차(’15.02.06.~’16.12.30)	24일 연장
용역비	418,000천원(총차) 287,000천원(2차)		변경없음
용역업체	㈜미래이엔디,(주)비엠도시건축사사무소,(사)한국도시설계학회		변경없음

○ 설계변경 사유

- 도시계획위원회의 소위원회 자문 의견을 반영하여 본위원회 재상정하기 위해 용역기기간 연장

*************************************************************************************************

***************************************************

□ 향후계획

○ 2016.12.05. : 용역기간 연장 의뢰 (공동주택과→재무과)

○ 2016.12.06. : 용역계약(재무과)

********************

*************************

**********************************************************