문서번호	정수과-4344
결재일자	2016.12.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
김태현		김형섭	12/02 박기석
협조	정수시설과장		김긍채
	주무관		장호

「2016년 정수처리시설 청소용역」

하반기 정수시설 청소 완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

강북아리수정수센터

(정 수 과)

「2016년 정수처리시설 청소용역」

하반기 정수시설 청소 완료 보고

우리 정수센터에서 시행 중인 『2016년 정수처리시설 청소용역』 추진 관련하여 하반기 청소를 완료하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		추진근거

정수처리시설 청소용역 시행계획(정수과-428, 2016. 2. 5.)

2016년 하반기 정수시설 청소 추진계획(정수과-2605, 2016. 7.28.)

Ⅱ		용역개요

용 역 명 : 2016년 정수처리시설 청소용역

용역업체 : 미래종합관리(대표자 권금옥)

용역기간 : 2016. 3. 14. ～ 2016. 12. 20.

용 역 비 : 금174,494,750원

청소물량

□ 주벽청소 232,678㎡, 정수지 청소 31,753㎡, 슬러지 청소 5,120㎥, 상징수 이송 2회

청소횟수

□ 년 1회 : 정수지, 활성탄흡착지

□ 년 2회 : 응집․침전지(웨어 및 수로 포함), 여과지, 배출수처리장

□ 년 2회 : 응집지 침전슬러지 및 배출수 처리장 농축슬러지

※ 예산에 의거 응집․침전지 4계열 4개지는 년 1회

Ⅲ		추진결과

하반기 청소결과 : 연간 공정율 대비 100% 청소 완료(하반기 57%)

※ 계약금액 및 공정별 여건에 따라 청소물량 조정

청소대상(2차 작업지시 내용)

□ 2차 용역기간 : 2016. 8. 6. ～ 2016. 12. 20.

□ 작업지시 내역

- 주벽 청소 : 120,337㎡

- 침전슬러지 청소(응집지) 864㎡, 농축슬러지 청소(배출수처리장) 1,765㎡

- 정수지 청소 : 주벽 16,673㎡, 바닥 15,080㎡

- 농축조 상징수 이송(4지) : 1회

청소완료 현황

□ 2차 작업기간 : 2016. 8. 6. ～ 2016. 12. 1.

□ 청소완료 내용

- 응집지(24지) 1회 : 주벽․패들․수로 청소, 바닥 퇴적물 제거

- 침전지(24지) 1회 : 주벽, 바닥, 웨어 및 수로 청소

- 여과지(56지) 1회 : 주벽, 유입수로, 중앙수로

- 배출수지(4지), 배슬러지지(2지), 회수조(2지), 1․2차 농축조(각 2지) 각 1회

- 정수지(4지) 1회 : 주벽, 바닥 청소

- 착수정(4지) 1회 : 주벽․바닥 청소 및 퇴적물 제거

※ 착수정 공사에 따른 주벽․바닥 청소 및 퇴적물 제거

□ 청소완료 세부내역

구 분		단위	작 업 물 량(2차)			증감사유
공종	구조물구분		지시	준공	증감
주벽	침 전 지	㎡	59,775	59,775	-
	응 집 지	㎡	28,375	28,375	-
	침전지웨어	㎡	8,606	8,606	-
	침전지수로	㎡	2,185	2,185	-
	여 과 지	㎡	10,287	10,287	-
	배출수지	㎡	3,536	3,536	-
	배슬러지지	㎡	1,323	1,323	-
	회 수 조	㎡	1,494	1,494	-
	1차 농축조	㎡	3,485	3,485	-
	2차 농축조	㎡	1,271	1,271	-
	착수정	㎡	-	1,744	증 1,744	착수정 공사에 따른 주벽․바닥 추가 청소
	소 계	㎡	120,337	122,081	1,744

구 분		단위	작 업 물 량(2차)			증감사유
공종	구조물구분		지시	준공	증감
정수지	주벽	㎡	16,673	16,673	-
	바닥	㎡	15,080	15,080	-
	소 계	㎡	31,753	31,753
응집지 (침전 슬러지)	유입수로	㎥	35	35	-
	응 집 지	㎥	829	829	-
	소 계	㎡	864	864
착수정 (침전슬러지)	착수정	㎥	-	117	증 117	착수정 공사에 따른 바닥 퇴적물 제거
	소계	㎥	-	117	117
농축 슬러지	배출수지	㎥	142	142	-
	배슬러지지	㎥	378	378	-
	1차 농축조	㎥	1,025	1,025	-
	2차 농축조	㎥	220	220	-
	소 계	㎡	1,765	1,765	-
상징수 이송	농축조 (4지)	회	1	1	-

Ⅳ		행정사항

2016년 하반기 정수처리시설 청소 완료

□ 2차 작업지시서에 따라 주벽 및 슬러지 청소 실시

□ 현장여건에 맞게 작업물량 변경하여 해당 물량을 청소 완료하였기에

당초 계약금액 범위 내에서 2차 정산처리

청소용역 정산 설계변경 및 변경계약 실시

□ 작업물량 증가에 따른 정산 및 사후정산 대상 보험료(국민건강보험, 국민연금보험, 노인장기요양보험) 납입 증빙서류 확인 후 정산 설계변경 시행

□ 정산 설계변경에 따른 변경계약 및 준공 처리

붙임 : 1. 청소현황 및 완료내역 각 1부.

2. 청소 사진자료 1부.  끝.