문서번호	설비부-2931
결재일자	2014.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시책사업과장	설비부장
박경철		代김원태	전결 03/18 박기형
협 조
	서무팀장			손광언
	주무관			현승주
	주무관			유영선

『아동복지센터 소방설비 성능개선공사』

예비 준공검사 시행계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 03.

도시기반시설본부

설비부

『아동복지센터 소방설비 성능개선공사』

예비 준공검사 시행계획 보고

『아동복지지센터 소방설비 성능개선공사』관련, 공사품질을 확보하고 공사준공에 대비하고자 아래와 같이 예비 준공검사 실시계획을 보고드림

1		공 사 개 요

❍ 공 사 명 : 아동복지센터 소방설비 성능개선공사

❍ 공사기간 : 2014. 01. 02 ~ 2014. 5. 01.

❍ 공사규모 : 지하1층/지상2층(연면적 : 2,307㎡) ▶ 공정율 90%

- 간이스프링클러 배관 및 펌프,  자탐설비, 화재속보설비, 등기구 교체 등 1식

❍ 공사금액 : 363백만원(기계 256, 전기 107)

❍ 시 공 사 : 기계-삼성기계공무㈜, 전기-㈜분천이엔지

❍ 감 리 단 : ㈜동남엠이씨

2		관 련 근 거

❍ 행정2부시장방침 제 316(2012.09.25), 제 171호(2013.05.20.) 및

제 27호(2014.02.06.)

▶ 예비 준공검사 전면 실시계획 및 이행실태 보고

❍ 동남 제2014-312호(2014.3.18.) : 예비준공검사 시행계획 보고

3		예비 준공검사 계획

❍ 준공검사 일시 : 2014.3.21.(금) 14:30

❍ 검사자(담당분야 주무관 3명)

- 설비부 시책사업과 조기성(기계) 주무관

- 설비부 시책사업과 김홍석(전기) 주무관

- 건축부 복지시설과 정재흥(건축) 주무관

❍ 입회자

- 공사담당 : 박경철(기계), 유영선(전기), 현승주 주무관(건축)

- 감리단 및 시공사(기계, 전기)

- 시설유지관리부서(아동복지센터)

❍ 검사내용

- 준공기한내 준공 가능여부

- 감리원이 확인한 공사내용(정산설계도서 등) 중 미진사항

- 기타 불편사항 등

❍ 검사결과 조치계획

- 검사결과 지적사항에 대하여 감리단에 보완 지시

- 지적사항 등에 대하여 보완완료 후 감리단 확인 후 준공검사원 제출

4		향 후 계 획

❍ 2014. 3. 31. : 예비 준공검사 지적사항 보완

❍ 2014. 4. 15. : 최종 준공검사 후 준공

❍ 2014. 4. 30. : 인계·인수

따로붙임 : 예비 준공검사 점검표 1부.  끝.