문서번호	시설보수과-5277
결재일자	2016.12.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
신동헌		이용재	12/05 이덕기
협조

설 계 변 경 (정 산) 보 고

- 대방천복개 포장 및 보수공사 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

남부도로사업소

(시설보수과)

설 계 변 경 (정 산) 보 고

- 대방천복개 포장 및 보수공사 -

우리사업소에서 시행중인 「대방천복개 포장 및 보수공사」 감독기관인 시설관리

공단에서 제출한 설계변경(정산) 보고에 따른 검토보고 임.

Ⅰ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 대방천복개 포장 및 보수공사

○ 공사기간 : 20106. 07. 04. ~ 2016. 12. 31.

○ 공 사 비 : 446,693,000원

(도급비 351,273,000원, 관급비 64,780,000원, 이전비 30,640,000원)

○ 공사개요 : 절삭후 재포장 28a, 교면방수 2,800㎡, 신축이음보수 90m 등

○ 도 급 자 : 유등건설(주) 대표 이혜경

○ 감독부서 : 서울시 시설관리공단(공사감독1처 이문기)

Ⅱ		설계변경 현황

가. 설계변경 사유

○ 공사착수전 설계도서 검토보고회 결과 등에 따른 설계도서 보완 지시

- 관련근거 : *********************************************

○ 추가작업지시에 따른 물량변경

- 관련근거 : **********************************************

○ 현장여건에 따른 수량 증·감 및 신규공종 발생

- 관련근거 : **********************************************

○ 기타사항 : 제경비 실정산, 감독부서 제8회 설계변경 심의결과 반영 등

나. 주요 변경내용

****	*****	**	****		* * *
			**	***
***********	***************	*	**	****	**	****
***********	**************	*	*	****	**	*****
*****	**	*	***	*	**	****
*****	*************	*	*****	*	**	*****
**********	****************	*	*	***	**	****
*************	*****************	*	**	*	**	***
*************	***********************	*	*	***	**	***
*****************	***************	**	*	*	**	***
*****************	***************	**	*	*	**	***
****	*****************	*	*****	*****	**	***
****	*****************	*	***	***	**	***
*****	**	*	*	**	**	***
*****	******	**	**	**	**	***
*******	***	**	***	***	**	***

다. 공사비 변경사항

(단위 : 원)

****		****	****	*****	****
*******		***********	***********	************
* * *	****	***********	***********	************
	*****	**********	**********	************
	******	***********	***********	************

Ⅲ		조 치 계 획

○ 설계변경 내용이 공사추진중 작업지시 및 실정보고에 따른 시공물량 변경

사항을 설계에 반영한 내용으로서

○ 설계변경(정산)내용대로 계약부서에 재계약 의뢰

*************************************************

○ 관급자재(아스팔트콘크리트)는 포장면적 증가에 따른 실제 사용된 물량

*********************으로 증량구매 후 정산 ***************

※ 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 하천복개구조물관리, 대방천복개

구조물보수보강공사, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임 1) 변경(정산)설계서 관련자료 1부.

2) 제비율검증확인서 1부.  끝.