문서번호	설비부-18872
결재일자	2016.12.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
윤대영		임현근	12/05 권오식
협조

『성동소방서 신축 기계공사(1차)』

실정보고사항검토보고

2016. 12.

도시기반시설본부

설비부

『성동소방서 신축 기계공사(1차)』

실정보고사항검토보고

우리 본부에서 추진 중인 『성동소방서 신축 공사』관련하여 기계설비공사(1차)에 대한 건설사업관리단으로부터 내역변경 실정보고가 있어 검토하고 보고 드림.

1		관련근거

❍ 성동GP02-351(2016.12.05.) : 성동소방서 신축 기계공사(1차) 내역변경 실정보고

2		공사개요

❍ 공 사 명 : 성동소방서 신축 기계공사

❍ 위    치 : 성동구 행당동92-6번지

❍ 공사규모 : 지하1층/지상6층,연면적 5,194㎡

❍ 공사기간  : ‘16,02.01~ ’17.02.28.(총차:‘16.2.1~17.06.28)

❍ 도 급 액 : 금액150,000,000원(총차: 금액1,111,770,000원)

❍ 시 공 사 : ㈜신행설비외 1

❍ 건설사업관리단 : ㈜펨코엔지니어링건축사사무소

3		검토 보고 내용

❍  실정보고 내용 검토                                      (단위:천원)

구 분	현황 및 문제점	검 토 의 견
옥외배관공사 및 기계실배관공사	- 건축선행공정 지연으로 수관세착장 배관공사 내역변경 필요 기계실 배관공사 일부 내역변경 필요	- 선공공정 지연으로 금차내 작업이 어려워 다음차수로 이월 계약 반영 (감2,769천원)
공조배관공사	선행공정 지연으로 지상1~5층 배관공사 내역 조정 필요	- 바닥난방용 복합밸브 선행 설치 타당함 (증850천원)

구 분	현황 및 문제점	검 토 의 견
냉난방배관공사 및 환기닥트설치공사	- 선행공정 지연으로 지하층 및 1~6층 화장실 배기 및 입상 덕트 내역 조정 필요	- 골조공사 진행중으로 지하층 및 기계실 및 전기실 일부만 설치하고 다음차수로 변경이 타당함 (감7,947천원)
위생배관공사 및 경유배관공사	- 선행공정 지연으로 1~5층 급수급탕 및 오배수 배관공사 내역 조정 필요 스리브 설치 작업 일부 내역 조정 필요	급수.급탕 및 오배수 공사 일부 다음차수로 변경이 타당함 지하층 조적공사 지연으로 다음 차수로 변경이 타당함 (감1,668천원)
가스배관공사 및 에어배관공사	- 선행공정 지연으로 내역 조정 필요 지상3층 구내식당 가스배관 일부 지하층 및 소방차고등 에어 배관 일부	선행공정 지연으로 다음차수로 변경이 타당함. (감712천원)
옥외매립형유류탱크 및 옥내소화배관공사	- 선행공정 지연으로 내역 조정 필요 지상 1~5층 소화배관 공사 일부 지하층 스프링클러 배관 공사 일부	건축공정의 공정의 효율성을 위해 옥외매립형유류탱크 선행 설치 선행공사 지연으로 옥내소화 배관 및 스프링클러 배관 공사 다음차수로 변경 이 타당함. (증2,200천원)
순 공 사 비		(증)2,064천원
제 경 비		(감)2,064천원(보험료 정산등)
도 급 비 (1차)		금150,000천원(변경없음)

❍ 감리단 검토의견

- 건축 선행공정 지연에 따른 성동소방서 신축 기계공사(1차) 계약금액의 변경 없이 내역을 변경 함으로서 공정관리에 만전을 기하고자 함.

4		보고자 의견

❍ 우리본부에서 추진 중인『성동소방서 신축 공사』관련, 건설사업관리단으로부터 제출된 기계공사(1차) 내역변경 실정보고에 대한 건설사업관리책임기술자 검토의견을 검토한 결과 타당하다고 사료되어 예산의 효율적인 집행을 위해 실정보고 사항을 승인후 내역을 조정하여 재계약 의뢰하고자 함.

따로 붙임 : 1. 건설사업관리단 전기공사(1차) 내역변경 실정보고 1부. 끝