문서번호	도로보수과-1611
결재일자	2014.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	남부도로사업소장
정철식		김승태	03/18 민승기
협조
	주무관		한수영

2013년 포장도로굴착복구공사(연간단가)

설계변경(정산)검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

남부도로사업소

(도로보수과)

2013 포장도로굴착복구공사(연간단가)

설계변경(정산) 검토 보고

우리사업소에서 시행중인 『2013년 포장도로 굴착복구공사(연간단가)』에서 병행추진하고 있는 2013/14제설작업 민간위탁용역기간이 종료됨에 따라 제설인력(상황반장, 작업원, 운전원)비상근무시간 정산 보고임.

Ⅰ		사업개요

가. 공 사 명 : 2013년 포장도로 굴착복구공사(연간단가)

나. 공사개요 : 소규모포장복구(t=80cm) 140a

차로단위복구(t=5cm) 230.5a

제설작업 민간위탁용역 1식

다. 공사기간 : 2013. 3. 20 ~ 2014. 3. 30.

라. 계 약 자 : (주)예스코서비스 대표 박채신

마. 계약금액 : 1,702,541천원

Ⅱ		주요변경내용

가. 제설작업 민간위탁 비상근무시간 계약물량(상황반장, 작업원, 운전원)정산.

Ⅲ		세부사항

가. 정산 설계변경 내역

- 도로굴착복구 공사

공 종	규격	단위	수 량			비 고
			당초	변경	증․감
소규모 포장복구	야간	a	140.66	140.66	-
차로단위복구	야간	a	230.57	230.57	-
소파 포장복구비	주간	a	15.56	15.56	-

- 제설작업 민간위탁용역

구 분	규격	단위	수 량			비 고
			당초	변경	증․감
제설작업 상황반장	주간	시간	300	143.5	감) 156.5
“	야간	시간	150	102.5	감) 47.5
제설작업원	주간	시간	600	362	감) 238
“	야간	시간	600	212	감) 388
제설작업 운전원(덤프,백호)	주간	시간	2,000	1,318.5	감) 681.5
“	야간	시간	1,500	838.5	감) 661.5
제설작업(15톤덤프)	15톤	시간	1,390	652	감) 738
제설작업(백호0.6㎥)	백호	시간	150	113	감) 37

나. 예산과목별 반영 금액

(단위 : 원)

구 분		설계변경		비 고
		당초	변경
총 계약액		1,702,541,550	1,608,211,000	감)94,330,550
도로굴착복구공사	도급비	1,299,144,000	1,299,144,000	-
노후포장도로정비	도급비	101,937,000	101,937,000	-
노후포장도로(사무관리비)	도급비	20,000,000	20,000,000	-
제설대책(사무관리비)	도급비	271,460,550	207,130,000	감)94,330,550
제설대책(시설비)	도급비	10,000,000	10,000,000	-

다. 예산과목

- 도로관리과, 도로시설물관리, 도로굴착복구, 도로굴착복구공사, 시설비

- 도로관리과, 도로시설물관리, 노후포장도로정비공사, 시설비

- 도로관리과, 도로시서물관리, 노후포장도로정비공사, 사무관리비

- 도로관리과, 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리, 제설대책추진, 사무관리비

- 도로관리과, 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리, 제설대책추진, 시설비

Ⅳ		조치의견

○상기 내용과 같이 정산 설계변경 및 준공처리하고 2014년도 제설대책추진(사무관리비)잔여 사업비에 대하여는 하반기 제설대책 예산으로 활용하고자 함.

- 2014년도 재배정 예산(사무관리비) : 310백만원

- 지출액 : 116백만원

- 잔여액(‘14/’15 제설대책 민간위탁 용역 활용액) : 194백만원

첨부 :  설계변경 내역서(정산) 1부. 끝.