문서번호	공간정보담당관-13321
결재일자	2016.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공간정보개발팀장	공간정보담당관
최지혜		김태준	12/05 조봉연
협조

2016년 항공사진 고도데이터 서비스 사업 주간업무(12월1주) 및 11월 월간보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
공간정보 담당관-3311				122,850천원

2016. 12.

정 보 기 획 관

(공간정보담당관)

2016년 항공사진 고도데이터 서비스 사업

주간업무(12월 1주) 및 11월 월간보고

사업명			2016년 항공사진 고도데이터 서비스
사업기간			‘16.7.12.~‘16.12.31.	서울시담당		공간정보담당관 최지혜
사업비			122,850천원	업체/PM		㈜씨엠월드 컨소시엄 박철희 차장
보고기간			‘16.11.28.~‘16.12.02.	전체공정율		계획 79.67% / 실시 79.67%
주요내용			1. 기무사 보안 처리 완료 및 국정원 보안심사 진행 2. 자료 이관 준비 및 실행
주간 업무 보고
Part	금 주 실 적 (2016.11.28 ~ 2016.12.02)				차 주 계 획 (2016.12.05 ~ 2016.12.09)
사업관리	1. 사업관리 - 개발 및 DB구축 일정 체크				1. 사업관리 - 개발 및 DB구축 일정 체크
시스템 개발	1. 구현 - 3D 지도 기능 개발(진행중) a. 2D/3D 화면 전환 기능 b. 이동, 확대, 축소 c. 지도 이전/다음, 따로/이어보기 2. 기능별 테스트(진행중)				1. 구현 - 3D 지도 기능 개발 2. 기능별 테스트 3. 3D GIS S/W 설치
DB구축	1. 자료이관 준비 및 실행 - 원본관리시스템용 DB 준비 : 25Cm JP2000, ECW 이관중(70%진행중) - 대시민 서비스용 DB 준비 2. 메타데이터 작업(진행중) - 항공사진 성과심사결과물 메타데이터 구축 3. 국정원 보안 심사 결과 대기중 - 총 819매에 대한 심사 의뢰(2016.11.23.) a. 2차 입수 자료 보안 대상 = 340매 보안 대상 b. 2차 입수 자료 보안 대상 = 372매 보안 대상 c. 3차 입수 자료 보안 대상 = 107매 보안 대상				1. 국정원 보안 심사 결과에 따른 편집 작업 2. 메타데이터 작업 - 항공사진 성과심사결과물 메타데이터 구축 3. 자료이관 - 원본관리시스템용 DB - 대시민서비스용 DB - 메타데이터
산출물/ 별첨자료	○ 주간보고서 및 월간보고서 각 1부.
협조사항
對 서울시
對 용역업체
기타