문서번호	기전과-15882
결재일자	2016.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장
김근수		12/05 박재경
협조

2016년 교통안전표지 유지보수공사 4차작업 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

강서도로사업소

(기전과)

2016년 교통안전표지 유지보수공사 4차작업계획

우리 사업소에서 추진중인 2016년도 교통안전표지 유지보수공사의 4차 작업계획을 수립 시행하여 관내 교통안전표지의 유지관리에 만전을 기하고자 합니다

공 사 개 요

◦ 공 사 명 : 2016년 교통안전표지 유지보수공사

◦ 공사규모 : 교통안전표지 신설 160매·set,

교통안전표지 교체 160매·set,

교통안전표지 철거,제거,조정 30매·set,

교통안전표지 도장,보수,이설 10매·set

◦ 공사금액 : 124,872,100원(금일억이천사백팔십칠만이천일백원)

◦ 공사기간 : 2016. 3. 14 ~ 2016. 12. 31.

◦ 시 공 자 : ㈜부화산업 대표 이응열

◦ 감 리 자 : (주)건영이앤씨 대표 박준범

4차 작업계획

◦ 작업물량

구 분	총 계	신 설	교 체	도장·보수	철거·제거·조정	이설	비 고
수 량	130	91	35	-	4	-	-

◦ 작업기간 : 2016. 12. 05 ~ 2016. 12. 31.

◦ 소요금액 누계 : 약 124,680,000원(공정률 약 : 99.8%)

- 1차 부분준공금액(1~2차) : 90,400천원, 계약잔액 : 약 34,000천원

- 금회 소요금액 : 약 19,000천원

세부 추진계획

◦ 2016. 12. 05. 시공사에 4차 작업지시 및 감리사에 감리 지시

◦ 2016. 12. 31. 작업완료

기 타 사 항

◦ 교통통제 등이 필요할 시 해당기관의 승인을 득한후 대시민 홍보를 시행하고 작 업토록 조치

◦ 교통관리 및 안전관리를 철저히 하고 천재지변 및 기타 사유로 공사기간 지연시 사전 협의토록 조치

◦ 작업구간내 비보호 좌회전 안전표지 신설시 노면 및 신호기 공사 완료여부를 확인하고 작업 시행토록 조치

◦ 보행자 및 자전거전용도로 교통안전표지는 설치높이(2m) 기준에 맞게 시공(확인)

◦ 교통안전표지 설치시 표지판이 흘러내리지 않게 T형 부착대 하부에 구멍을 뚫어 볼트 및 너트를 활용 마감처리토록 조치

◦ 기자재관련 시험성적서 및 기자재 거래증명서 제출.

◦ 작업완료 보고전 tgis.seoul.go.kr 에 시공사항 자료 입력  후 작업완료 보고할 것.

붙임 : 1. 4차 작업 지시서 1부.

2. 4차 작업 설계내역서 1부.

3. 4차 작업 구간표 1부.  끝.