문서번호	설비부-18911
결재일자	2016.12.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
김두환		유병기	12/05 권오식
협 조
	광역도로과장			진재섭

- 구리암사대교 건설 전기공사 -

미(未) 인수·인계 준공시설물 처리계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

도시기반시설본부

설비부

- 구리암사대교 건설 전기공사 -

미(未) 인수·인계 준공시설물 처리계획

본 전기공사 준공시설물인 가로등에 대하여 인수·인계하고자 관련 기관과 협의한 결과 문제점 발생으로 인수·인계가 지연되고 있어 다음과 같이 처리하고자 보고 드림.
		ㅊ
	ㅊ

1		공사개요

□ 공사명: 구리암사대교 건설 전기공사

□ 공사규모 : 가로등 설치×604본, 경관조명 설치×1식

□ 공사기간 : 총차 2010.07.28.~2016.12.31.

5차 2015.12.30.~2016.12.31.

□ 도 급 비 : 총차 금4,142,466,000원

5차 금72,593,000원

□ 계 약 자 : 모범전설(주) 대표 오세창

2		인수·인계 지연내용(기관별)

□ 구리시청

○ 지연사유(구리시청 요구사항)

□ 공사 타절한 N도로(중로3-26호선) 재개설 요구

□ 구리시 구간의 도시계획시설사업 실시계획 준공인가 조건 이행 완료 후 가로등 인수·인계에 대하여 협의 가능 통보

㉮ 구리한강 시민공원 교량 하부 공간 정리 미 이행(토목)

㉯ 추가 요구 사항에 대하여 구리시(부서별)와의 완료 협의 미 이행 등

○ 인수 대상(준공시설물) 현황 : 세부내용 첨부

- 위치 : 강변북로, 구리한강시민공원 연결도로, M도로(중로3-1호선)

- 시설현황 : 가로등주 140본(가로등기구 170등), 가로등용 분전함 5면

- 전기요금 납부 현황 : 월(평균) 200천원 소요(전기수전1면/총5면)

※ 참고) 현재 전기수전 대상 분전함5면 중 1면만 전기수전(계량기설치)을 한 상태이며         나머지 4면은 기존 구리시 가로등에 연결하여 점등하고 있음.

(인수·인계 완료시 한전 계량기를 설치할 예정임)

□ 서울시 시설관리공단

○ 지연사유(시설관리공단 요구사항)

□ 아천IC 램프에 설치된 가드레일 설치사항에 대하여 보완 시공 완료 조치 후 일괄로 모든 준공시설물에 대하여 인수·인계 조치 요구(부분 인수 반대)

○ 인수 대상(준공시설물) 현황 : 세부내용 첨부

- 위치 : 구리방면 램프 도로(아천 IC), 암사방면 램프 도로(암사IC)

- 시설현황 : 가로등주 212본(가로등기구 212등), 가로등용 분전함 8면

- 전기요금 납부 현황 : 월(평균) 1,800천원 소요(전기수전 8면/총8면)

3		인수·인계 지연에 따른 문제점

□ 2017년 공공(전기)요금 및 유지관리비 예산확보 필요

○ 준공시설물 가로등을 해당 유지관리기관에 인수·인계 완료 시점까지 점등 운영에 소요되는 예산(전기요금+유지관리비) 확보 필요

- 소요예산 : 연간 42,000천원

={전기요금 2,000천원(월)+유지관리비 1,500천원(월/주1회 순찰)}×12개월

□ 가로등 유지관리 기관 재선정 필요

○ `16.12월 까지는 본 전기공사에 포함하여 유지관리를 하였으나, 금년도에 준공이 불가피한 실정으로 가로등 시설물에 대한 민원(부점등) 처리 등을 위하여 해당 유지관리기관에 인수·인계 완료 시점까지 유지관리 기관 재선정 필요

4		처리계획

□ `16년말로 전기공사 준공으로 `17년도부터는 가로등 유지관리가 우리 본부에서는 불가하므로 미(未) 인수·인계 가로등 시설물 운영에 소요되는 예산 확보 및 유지관리 기관 재선정 처리

→ 처리 부서 : 도로계획과(주관과)

□ 구리시청 및 서울시 시설관리공단측에서 요구하는 보완사항에 대하여 조속히 완료 후 인수·인계 처리

→ 처리 부서 : 도시기반시설본부(토목부)

5		향 후 계 획

□ 2016.12.09. : 미 인수·인계 시설물 조치계획 수립 요청

(도시기반시설본부→도로계획과)

□ 2016.12.20. : 전기공사(5차) 준공검사

따로붙임 : 1. 기관별 미 인수·인계 준공시설물 현황 1부.

2. 구리시 회신내용(공문) 1부. 끝.