투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서울특별시 남부도로사업소장(기전과장)
(경유)
제 목	교통안전시설물(신호등) 원인자부담공사 준공기한 연기요청

1.관련근거

· 방재시설부-18277(2016.11.21.)

· 기전과-6143(2016.11.23.)호와 관련입니다.

2.우리본부에서 추진중인『 신상도 지하차도 확장공사 』와 관련으로 시점부

부분 공사시행으로 교통안전시설물(신호등) 원인자부담공사에 대하여 아래와 같이 준공

기한 연기요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 신상도 지하차도 확장공사

나. 공사현황

- 위 치 : 동작구 상도동 159-24호(더#아파트 진입초입부)

- 규 모 : 보도Set-back후 1개차로 확보

- 내 용 : 신호등 이설(신설)

다. 준공기한연기

구 분	당 초	변 경	비고
승인기간	′16.11.23. ~ ′16.12.07.	′16.11.23. ~ ′16.12.20.	승인일 ′16.11.23

라. 연기사유 : 신호등 지주 및 암 신규제작으로 공기부족. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이석근		방재시설과장	이도헌		방재시설부장	12/05 임춘근
협조자
시행	방재시설부-19156	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	02-3708-8765	/전송	02-3708-8756	/	sttomog@seoul.go.kr	/	대시민공개