문서번호	청소행정과-26933
결재일자	2016.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		청소작업팀장		청소행정과장		주민생활국장
조대환		김용섭		황규영		12/05 소판수
협조
	재무과장		김성철
	계약팀장		김종수

★ ◉

2016년도 공공처리시설

반입불가 폐기물 처리 용역 설계변경 계획

청소행정과

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 □ 공약(약속)사업 □ 계속사업 ☑ 인센티브/공모사업 □
소통분야 고려사항		●	구민		:		유 □ ( ) 무 □
		●	전문가		:		유 □ ( ) 무 □
		●	이해당사자		:		유 □ ( ) 무 □
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 □ 유지비용 □ 바른 공공언어 □
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:		유 □ ( ) 무 □
		●	서울시	:		유 □ ( ) 무 □
		●	기업	:		유 □ ( ) 무 □
		●	민간단체	:		유 □( ) 무 □
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 □
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

2016년도 공공처리시설 반입불가 폐기물 처리 용역 설계변경 계획

관내 재개발 입주로 인해 당초 처리예상 물량보다 폐기물량이 증가하여 공공처리시설 반입불가 폐기물 처리 위탁용역에 대하여 설계변경을 통해 폐기물처리에 만전을 기하고자 함.

계약개요

계약건명: 2016년도 공공처리시설 반입불가 폐기물 처리 위탁용역

계약업체: 신대한정유산업(주) (대표자 양유찬)

계약기간: 2016. 11. 23  ~ 2016. 12. 31.

계약금액: 금19,200,000원

예산과목: 청소행정과, 청소관리, 자원재활용 및 폐기물처리, 폐기물 처리,

민간이전, 민간위탁금

설계변경 내역

위탁물량 변경

구 분	변경전	변경후	증 감
위탁물량(예상)	160톤	270톤	110톤
톤당 단가	112,500원	115,556원	3,056원

계약금액 변경

(단위: 원)

구 분		당초금액	변경금액	증액금액
도급 금액	계약금액	18,000,000	31,200,000	13,200,000
	부가세	면세	면세
	계

예산현황(2015년 사고이월금액: 5,601,180원 포함)

(단위: 원, 11.30기준)

폐기물처리 (민간위탁금) 예산 잔액	설계변경 금액	설계변경 후 잔액	비 고
15,179,940	13,200,000	1,979,940원

설계변경 사유

당초 처리예상 물량보다 폐기물 처리량 증가로 설계 변경

- 관내 재개발 지역의 입주에 따른 폐기물 물량이 증가함에 따라

반입불가 폐기물(폐합성수지 폐기물 등)의 안정적 처리를 위해

설계변경

※ 【계약 과업내역서: 운송 및 처리조건】

연간 단가계약의 처리물량은 예정량이며, 처리물량이 예정량 보다 적을          경우에는 입고 총량으로, 처리물량 초과시에는 쌍방의 합의 하에 처리한다.

행정사항

설계변경  ----- 재무과

붙임   산출내역서 1부.  끝.