문서번호	기전과-13263
결재일자	2016.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
호정오		전결 12/05 양영민
협조

교통신호기 신설 및 보수공사(2지역 2차)

실정보고사항 검토보고(2회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

서부도로사업소

[기  전  과]

교통신호기 신설 및 보수공사(2지역 2차)

실정보고사항 검토보고(2회)

교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가-2지역 2차) 업무수행 중에 책임감리가 제출한 2차 작업지시의 실정보고(2회)에 대하여 내용을 검토하고 그 결과를 보고함.

□ 관련근거

○ 2016년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가-2지역) 2차 작업지시 실정보고-2회

- 문서번호 대영유비텍(주) 대영GE16A-12-02호(2016.12.01.)

□ 공사개요

○ 공 사 명: 2016년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가-2지역)

○ 공사위치: 서부도로사업소 관내(마포구, 은평구)

○ 공사내용: 교통신호기 신설 및 보수 1식

○ 계약금액: 655,000,000원

○ 공사기간: 2016.3.14. ∼ 2016.12.26.

○ 계약업체: 범한전력공사 대표 박희자

○ 감리업체: 대영유비텍(주)

□ 2차 작업지시개요

○ 작업위치: 마포구 월드컵북로 260 외 84개소

○ 작업지시금액: 376,200,000원

○ 작업지시기간: 2016.7.27. ∼ 2016.12.16.

□ 실정보고 내용

○ 변경 예상금액: 증 1,000천원

○ 세부내역

- 마포구 중암교: 증 260천원

․구청의 원인자복구 요청에 따라 원인자복구로 시행

- 은평구 삼성주유소: 증 740천원

․차량검지기 회로의 설계오류 정정에 따라 맨홀 신설 및 철거수량 변경

※ 붙임 실정보고 참조

□ 조치의견

○ 감리업체 실정보고 내용이 타당하여 감리업체에 우선 실정보고 내용에      따라 작업 시행토록 지시하고 추후 정산하고자 함

붙임  감리업체 2차 작업지시 실정보고-2회 1부.  끝.