투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(서초역~방배로간 도로개설공사 건설폐기물 처리용역-1차분)

우리부에서 추진중에 있는 「서초역~방배로간 도로개설공사 건설폐기물 처리용역-1차분」 의 준공기한 연기를 아래와 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 서초역~방배로간 도로개설공사 건설폐기물 처리용역(1차분)

나. 용 역 비 : 100,000,000원(총차 478,963,400원)

다. 용역기간 : 2015.12. 4 ~ 2016.12. 3(총차 '19. 4. 3)

라. 도 급 사 : (주)건용환경개발

마. 예산과목 : 도로계획과, 도로건설, 간선도로망확충, 서초역~방배로간 도로확장, 시설비

바. 준공기한 연기

1) 당초 2015.12. 4 ～ 2016.12. 3

2) 변경 : 2015.12. 4 ～ 2017. 4.28(146일 연장)

사. 연기사유 : 정보사 이전 지연과 시점부 민원발생으로 공정계획에 차질이 발생되어 1차 계약물량의 집행시기 미 도래로 용역기간을 연기하고자 함.

붙임 : 1. 보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	조동협		치수시설과장	김흥근		방재시설부장	12/05 임춘근
협조자	계약2팀장	양주춘
시행	방재시설부-19205	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 14층	/
전화	02-3708-8774	/전송	02-3708-8756	/	yerom@seoul.go.kr	/	대시민공개