문서번호	설비부-18820
결재일자	2016.12.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
이종근		유병기	12/05 권오식
협 조
	조경시설과장			代임성은
	환경시설과장			조성만
	문화시설과장			최달수

『난지물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역』

용역기간 연장 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12

도시기반시설본부

(설  비  부)

『난지물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역』

용역기한 연장 검토 보고

『난지 물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역』과    관련 설계용역사에서 제출한 과업기간 연장 요청에 대해 검토하고 보고드림

Ⅰ		용역개요

○ 용 역 명 : 난지물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역

○ 규    모 : 총인처리 43.9만톤/일, 비총인 25만톤과 혼화 방류

○ 용역금액 : 1,256백만원

○ 용역기간 : `15.9.22 ~ `16.12.14(450일)

○ 용 역 사 : ㈜범한엔지니어링종합건축사사무소 외 4

Ⅱ		추진경과

○`15.9.18 : 기본 및 실시설계 용역 계약

○`16.7. 5 : 1차(기본설계)용역 준공

○`16.7. 6 : 2차(실시설계)용역 착수

○`16.8.12 : 공법기자재 직접구매 예외 협의(서울지방중소기업청)

○`16.9. 8 : 용역계약 이관(물재생시설과 → 도시기반시설본부)

○`16.9.12 : 공법기자재 직접구매 예외 협의결과 회신(서울지방중소기업청)

○`16.10.11 : 공법기자재 구매 관련 협의 결과 조치요청(도기본 → 물재생시설과)

○`16.11.9 : 실시설계 전문가 자문회의(도시기반시설본부)

○`16.12.1 : 공법사 수질성능보증서 제출(공법사 → 물재생시설과)

Ⅲ		용역기한 연장 검토

□ 관련근거 : 설계사 과업기간 연장 요청(범한 16-450호, ‘16.11.28)

□ 용역기간 연장 내용

구분	계약금액 (변동없음)	용역기간 연장내용		비고
		당초	변경 후
총차	1,255,902,800원	’15.09.22~’16.12.14	’15.09.22~’17.02.27	75일 연장
2차	707,160,800원	’16.07.06~’16.12.14	’16.07.06~’17.02.27	“

□ 연장사유

○ 기본설계 과업기간 연장에 따른 실시설계 기간 부족(46일)

- 기본설계 과업기간 연장(‘15.9.22~’16.5.22 → ‘15.9.22~’16.7.5)에 따른 실시설계 소요기간 부족

○ 공법기자재 직접구매 예외 협의 등 소요(57일)

- 공법기자재 대한 중소기업청 직접구매 대상 예외 인증 협의(‘16.8.12) 및 심사(‘16.8.12)에 시일 소요

- 공법기자재 구매 관련 조달청 협의에 따른 공법사의 성능보장 동의서 및 기술사용협약서 미체결로 공법 관련 설계 지연

Ⅳ		검토의견

○ 용역사에서 제출한 과업기간 연장요청 내용 검토결과, 기본설계 기간이 약 1.5개월 연장되었고

○ 중소기업청 공법기자재 직접구매 예외 인정 협의 및 조달청 구매 협의 결과에 따른 공법사의 설계지원 부족으로 실시설계 소요기간이 추가 필요

○ 설계 진행에 따른 중복기간을 감안 산출된 103일 중 75일 연장함이 적정한 것으로 판단되어 설계용역 과업기간 연장요청을 승인하여 설계진행에 만전을 기하고자 함

- 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅴ		조치계획

○ 기본 및 실시설계용역 과업기간 연장 의뢰

○ ‘16.12월중 설계경제성 검토(VE)

붙임 1) 난지 설계용역사 과업기한 연장요청서 1부

2) 과업기간 연장 합의서 1부.