투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	변경계약의뢰(소화조보수공사)

1. 시설보수과-6962(2016.12.05)호와 관련입니다.

2. 우리센터에서 추진중인 『소화조 보수공사』에 대하여 아래와 같이 변경 계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 소화조 보수공사

나. 공사개요 : 방수, 방식 5,006㎡, 단면복구 616.3㎡, 기타부대공 1식

다. 공사기간 : 2016.09.09~2016.12.31

라. 공 사 비 : 1,072,951천원

마. 도 급 자 : ㈜한강산업개발 대표 최노성

바. 변경현황

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
총공사비		1,072,950,700	1,192,279,000	증 119,328,300
도급비	공급가액	975,409,728	1,083,890,000	증 108,480,272
	부 가 세	97,540,972	108,389,000	증 10,848,028
	계	1,072,950,700	1,192,279,000	증 119,328,300

사. 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영관리, 중랑                         물재생센터 공통분야 유지보수, 시설비및부대비, 시설비

붙임 : 관련문서 1부.    끝.

	시설보수과장
주무관	최승룡		시설보수과장	12/05 윤승범
협조자
시행	시설보수과-6967	(		)	접수		(		)
우	04809	성동구 자동차3길 64	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2572	/전송	02-2211-2579	/	csy21@seoul.go.kr	/	대시민공개