투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(진접차량기지 건설공사 설계단계 건설사업관리용역 2차)

1. 도시철도계획부-11564호(2016.12.5.)와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인 진접차량기지 건설공사 설계단계 건설사업관리용역(2차)에 대한 준공기한을 다음과 같이 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기

구 분		당 초	변 경	비고
준공 기한	총괄	2015.12.15.~2016.12.13.	2015.12.15.~2016.12.13.
	2차	2016. 3.15.~2016.12.13.	2016. 3.15.~2017.10.30.

붙 임 : 1. 준공기한 연기 방침서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박창복		도시철도설계과장	이명수		도시철도계획부장	12/05 권영찬
협조자
시행	도시철도계획부-11577	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시중구 청계천로8 프리미어플레이스빌딩10층	/
전화	02)772-7141	/전송	02)772-7304	/	chang93@seoul.go.kr	/	대시민공개