문서번호	기전과-13337
결재일자	2016.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
호정오		전결 12/05 양영민
협조

교통신호기 신설공사(연간단가 5차)

실정보고사항 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

서부도로사업소

[기  전  과]

교통신호기 신설공사(연간단가 5차)

실정보고사항 검토보고

교통신호기 신설공사(연간단가-5차) 업무수행 중에 책임감리가 제출한 5차 작업지시의 실정보고에 대하여 내용을 검토하고 그 결과를 보고함.

□ 관련근거

○ 2016년 교통신호기 신설공사(연간단가) 5차 작업지시 실정보고

- 문서번호 대영유비텍(주) 대영GE16A-12-05호(2016.12.05.)

□ 공사개요

○ 공 사 명: 2016년 교통신호기 신설공사(연간단가)

○ 공사위치: 서부도로사업소 관내(중구, 서대문구, 용산구, 마포구, 은평구)

○ 공사내용: 교통신호기 신설 1식

○ 계약금액: 699,000,000원

○ 공사기간: 2016.3.14. ∼ 2016.12.26.

○ 계약업체: 모범전설(주) 대표 오세창

○ 감리업체: 대영유비텍(주)

□ 5차 작업지시개요

○ 작업위치: 마포구 M펠리스웨딩R 외 11개소

○ 작업지시금액: 32,745,000원

○ 작업지시기간: 2016.11.21. ∼ 2016.12.19.

□ 실정보고 내용

○ 변경 예상금액: 증 5,200천원

○ 세부내역

- 마포구 M펠리스웨딩R 외 5개소: 증 1,500천원

․설계누락 및 현장여건에 따른 변경설치의 물량반영

(맨홀, 현시변경, 신호금구, 신호케이블 등)

- 서대문구 홍연교북측: 증 3,700천원

․현장조사결과 일부 지중구간 관로협소로 지중선로를 가공선로로 변경

․시각장애인용 음향신호기 추가설치

※ 붙임 실정보고 참조

□ 조치의견

○ 감리업체 실정보고 내용이 타당하여 감리업체에 우선 실정보고 내용에      따라 작업 시행토록 지시하고 추후 정산하고자 함

붙임  감리업체 5차 작업지시 실정보고 1부.  끝.