문서번호	기전과-13309
결재일자	2016.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
심예선		전결 12/05 양영민
협조

2016년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사 설계변경보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

서부도로사업소

(기전과)

2016년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사

설   계   변   경   보   고

2016년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사 업무 수행 중에 감리업체가 제출한 설계변경 건에 대하여 검토하고 그 결과를 보고함.

□ 관련근거

○ 2016년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사-서부 설계변경 제출 건

- 문서번호(주)트래픽스 TR-개선-1201(2016.12.5.)호

□ 공사개요

○ 공 사 명: 2016년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사

○ 공사위치: 남영동교차로 외 1개소

○ 공사내용: 신호기 신설·이설 및 위치조정 1식

○ 계약금액: 123,964,600원

○ 공사기간: 2016.4.29. ∼ 2016.12.10.

○ 계약업체: ㈜창희이엔에스 대표 임창우

○ 감리업체: ㈜트래픽스 대표 김희수

□ 설계변경내용

○ 변경금액: 감 15,108천원(123,964천원 → 108,856천원)

○ 설계변경내용

- 물량정산: 제어기완성품 신설 외 74공정

- 신규내역: 신호케이블 신설 외 13공정

- 보험료정산: 건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료 감액

※ 주요 설계변경 내용 붙임 참조

□ 설계변경금액(총괄)

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 감
도 급 비	123,964,600	108,856,000	감)15,108,600

□ 조치의견

○ 실정보고 내용의 물량정산, 신규내역 및 보험료의 정산을 반영한 감리      업체 설계변경 내용이 적정하여 이를 승인하고 설계변경을 시행하고자 함

붙임: 1. 감리업체 설계변경 제출 건 1부.

2. 계약금액조정검증확인서 1부.  끝.