함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 심의회 개최［2016년 도봉,노원구 관내 상수도시설물설치 및 보수공사(장기계속단가계약)］ -설계변경(1차)

우리 사업소에서 시행중인 “2016년 도봉,노원구 관내 상수도시설물 및 보수공사 (장기계속)”에 대하여 당초 계약물량 외 신규공종 발생 및 물량 증 ․ 감 사항이 있어 아래와 같이 설계변경 심의회를 개최코자 합니다.

가. 공사현황

○ 공 사 명 : 2016년 도봉,노원구 관내 상수도시설물 및 보수공사(장기계속)

○ 주요 신규공종

공종	규격	단위	단가	비고
고압블록 포장걷기	면적10㎡이상,지장물5%미만	a	87,799	HK011430
잔토처리	현장처리	㎥	16,366	HK040110
아스팔트 포장절단	100~150mm,야간	m	3,208	HK010111
콘크리트 포장절단	100~150mm,야간	m	3,629	HK010121
아스팔트깨기	소형브레이커,야간	㎥	102,776	HK010211
콘크리트깨기	소형브레이커,야간	㎥	135,367	HK010221
고압블록 걷기	면적10㎡미만,야간	a	329,400	HK011631
토사 절취	견질토사,야간	㎥	33,755	HK020121
인력 터파기	견질토사 0-1m,야간	㎥	39,892	HK020211
인력 터파기	견질토사 1-2m,야간	㎥	53,702	HK020221
되메우기	인력,야간	㎥	15,341	HK030111
잔토처리	현장처리,야간	㎥	30,686	HK040111
아스팔트포장깨기	굴삭기 0.2㎥(브레이카),야간	㎥	12,319	*********
파쇄물 걷기및 싣기	굴삭기 0.2㎥,야간	㎥	8,817	*********
터파기(기계100%)불량	굴삭기 0.2㎥,야간	㎥	11,317	*********
되메우기(기계100%)보통	굴삭기 0.2㎥,야간	㎥	2,387	*********
되메우기(기계100%)양호	굴삭기 0.2㎥환토재,야간	㎥	1,495	*********
기계다짐(보통)	(램머80kg),야간	㎥	7,752	SK401501
기계다짐(양호)	(램머80kg)환토재,야간	㎥	5,538	SK401701
A-파쇄물운반(인력상차비포함)	2.5DT(현장->집하장3km),야간	㎥	58,456	*********
A-파쇄물운반(0.2상차비별도)	4.5DT(현장->집하장3mk),야간	㎥	14,269	*********
C-파쇄물운반(인력상차비포함)	2.5DT(현장->집하장3km),야간	㎥	37,305	*********
C-파쇄물운반(0.2상차비별도)	4.5DT(현장->집하장3mk),야간	㎥	14,100	*********
주름마디 스텐관 부설공	20mm,지세	m	6,089	*********
주름마디 스텐관 부설공	50mm,지세	m	11,372	*********
나사조임식이음관접합	20mm,지세	개소	11,015	HN018202
나사조임식이음관접합	50mm,지세	개소	23,218	HN018502
슬립인조인트 접합공	20mm,지세	개소	5,394	HN020202
슬립인조인트 접합공	50mm,지세	개소	16,737	HN020502
강관접합	100mm	개소	15,828	표준품셈토목부문19-3-2-2
주철(이형관) 부설공	150mm(야간)	개소	25,721	HNA20151
주철(이형관) 부설공	250mm(야간)	개소	20,387	HNA20251
주철(이형관) 부설공	300mm(야간)	개소	22,750	HNA20301
주철(이형관) 부설공	400mm(야간)	개소	34,428	HNA20401
주철(이형관) 부설공	500mm(야간)	개소	42,838	HNA20501
K.P 이탈방지압륜 접합	150mm(야간)	개소	25,826	HNB16151
K.P 이탈방지압륜 접합	250mm(야간)	개소	49,661	HNB16251
K.P 이탈방지압륜 접합	300mm(야간)	개소	54,631	HNB16301
K.P 이탈방지압륜 접합	400mm(야간)	개소	102,300	HNB16401
K.P 이탈방지압륜 접합	500mm(야간)	개소	134,113	HNB16501
K.P 이탈방지압륜 철거	400mm(야간)	개소	51,149	HNB17401
K.P 이탈방지압륜 철거	500mm(야간)	개소	67,056	HNB17501
주철관 절단공(절단기사용)	150mm(야간)	개소	51,033	HNB20151
주철관 절단공(절단기사용)	250mm(야간)	개소	62,084	HNB20251
주철관 절단공(절단기사용)	400mm(야간)	개소	77,921	HNB20401
주철관 절단공(절단기사용)	500mm(야간)	개소	88,977	HNB20501
플랜지철거공	80mm(야간)	개소	6,950	HNB40081
플랜지철거공	150mm(야간)	개소	14,281	HNB40151
플랜지철거공	400mm(야간)	개소	28,948	HNB40401
플랜지철거공	500mm(야간)	개소	35,125	HNB40501
제수밸브 부설 및 접합공	80mm(야간)	개소	45,899	HNB70081
제수밸브 부설 및 접합공	150mm(야간)	개소	70,370	HNB70151
제수밸브 부설 및 접합공	300mm(야간)	개소	135,081	HNB70301
제수밸브 부설 및 접합공	400mm(야간)	개소	234,572	HNB70401
제수밸브 부설 및 접합공	500mm(야간)	개소	312,888	HNB70501
공기밸브 설치공	80mm(야간)	개소	45,899	HNC23081
원형밸브실 설치공(기초재생PE)	D=80mm,지세	개소	311,623	HNK14082
원형밸브실 설치공(기초재생PE)	D=100mm,지세	개소	312,664	HNK14102
원형밸브실 설치공(기초재생PE)	D=150mm,지세	개소	315,468	HNK14152
원형밸브실 설치공(기초재생PE)	D=150mm(흄관h=1.66),지세	개소	391,265	HNK14153
원형밸브실 설치공(기초재생PE)	D=150mm(흄관h=1.66),(야간)	개소	474,681	HNK14154
원형밸브실 설치공(기초재생PE)	D=150mm(야간)	개소	406,966	HNK14151
원형밸브실 설치공(기초재생PE)	D=200mm,지세	개소	318,192	HNK14202
원형밸브실 설치공(기초재생PE)	D=200mm(흄관h=1.66),지세	개소	393,989	HNK14203
원형밸브실 설치공(기초재생PE)	D=250mm(야간)	개소	412,414	HNK14251
원형밸브실 설치공(기초재생PE)	D=250mm(흄관h=1.66),(야간)	개소	480,129	HNK14253
원형밸브실 설치공(기초재생PE)	D=300mm(야간)	개소	415,138	HNK14301
원형밸브실 설치공(기초재생PE)	D=300mm(흄관h=1.66),(야간)	개소	482,853	HNK14303
철개고정장치 나사조임	D=80~300mm,야간	개당	4,602	HNT21111
구형밸브실 설치공	D=400mm(야간)	개소	2,193,342	HNK20401
구형밸브실 설치공	D=500mm(야간)	개소	2,198,710	HNK20501
철개설치공	원형 및 사각맨홀,지세	개소	84,697	HNK40115
철개설치공	원형 및 사각맨홀,야간	개소	138,095	HNK40116
철개철거공	원형 및 사각맨홀,지세	개소	42,348	HNK40120
철개철거공	원형 및 사각맨홀,야간	개소	69,047	HNK40121
제초 및 풀깍기	예초작업	㎡	167	표준품셈토목부문4-5-4-3
벽타일 떠붙이기(정사각형)	150x150 이상,바름두께 15mm(2회)	㎡	130,320	표준품셈건축부문10-2
바닥타일 떠붙이기(정사각형)	150x150 이상,바름두께 15mm(2회)	㎡	120,062	표준품셈건축부문10-2
바탕만들기	철제면	㎡	1,807	표준품셈건축부문17-2-3
바탕만들기	콘크리트면	㎡	1,552	표준품셈건축부문17-2-2
유성페인트칠	붓칠(2회)	㎡	3,389	표준품셈건축부문17-3-1
수성페인트칠	롤러칠(2회)	㎡	2,080	표준품셈건축부문17-6-1
수성페인트칠	붓칠(2회)	㎡	3,394	표준품셈건축부문17-6-2
하수관천공	D=150mm	개소	7,471	표준품셈토목부문19-2-3-2
앵커볼트설치	Ø13~Ø16mm	개소	9,931	표준품셈건축부문7-2-5
앵커볼트설치	Ø22~Ø25mm	개소	29,795	표준품셈건축부문7-2-5
울타리철거	철제기둥	m	11,388	표준품셈건축부문19-2
메쉬휀스(월계배수지)	(2*2*30)	개소	3,690,274	표준품셈
CONC인력비빔타설(무근구조)	설계강도 210㎏/㎠	㎥	232,322	H030120
적벽돌 쌓기	1.0B, 3.6m 이하,지세(야간)	천매	738,361	HT020101
적벽돌 쌓기	2.0B, 3.6m 이하,지세(야간)	천매	666,003	HT020201
구조물깨기(무근),기계	굴삭기 0.2㎥(브레이카)	㎥	30,009	*********
구조물깨기(무근),기계	굴삭기 0.2㎥(브레이카),야간	㎥	47,380	*********
보조기층공(분산)	t=10cm,10㎡미만(야간)	a	243,540	포장27호표
고압블록포장(띠복구)	T=6~8cm(야간)	a	1,482,377	포장130호표
보조기층재(10㎡이하시)	2.5DT(적치장->현장,야간3km)	㎥	8,708	SWP01231
경계블록설치	콘크리트	m	7,365	표준품셈토목부문12-5-3-2
소형공사안내판 설치 철거	45*90cm(야간)	개소	3,759	HZN43101
PE free 휀스 설치및철거	(야간)	m	2,540	HZN43201
안전시설 설치 및 철거	간선(배관-손료포함,야간)	일	43,557	HZN43631
경광등 설치 및 철거	손료포함,야간	hr	6,976	HZN43831
라바콘걸이대	수탁급수용(야간)	set	1,426	HZN43901
조명시설 설치 및 철거	손료포함,야간	일	173,880	HZN44210
수채공	D=50mm(야간)	hr	16,500	HZN45051
살수 및 청소	(야간)	m	1,540	HZN45301
교통정리원	(야간)	인	122,751	HZN46701
안전원	급수공사	건당	40,917	HZN46750
안전원	급수공사(야간)	건당	61,375	HZN46751
철거자재운반	4.5DT(현장->집하장),야간	톤	9,413	SW001501
밸브 개폐비	D=80~100mm(야간)	회	15,680	HZN57101
밸브 개폐비	D=150mm(야간)	회	19,501	HZN57151
밸브 개폐비	D=200mm(야간)	회	22,508	HZN57201
밸브 개폐비	D=250mm	회	13,600	HZN57250
밸브 개폐비	D=250mm(야간)	회	25,499	HZN57251
밸브 개폐비	D=300mm(야간)	회	27,955	HZN57301
밸브 개폐비	D=400mm(야간)	회	40,231	HZN57401
밸브 개폐비	D=500mm(야간)	회	47,044	HZN57501

○ 계약기간 : 2016.07.11 ~ 2017.06.30

○ 도급비 내역 : 553,735,920원

○ 계약업체 : ㈜상명건설    대표 김학진

나. 심의회 개최

○ 심의일정 : 2016. 12. 5(월) 14:00

○ 심의장소 : 급수운영과

○ 심의위원장 : 급수운영과장

○ 심의의원 : 시설6급 이승완, 시설7급 강대유, 시설7급 박상권, 시설7급 이한수

다. 심의내용

○ 신규공종 및 계약물량 증․감에 대한 설계변경 사항

- 물량변동의 적정성 여부

- 계약 변동(증․감) 물량 계약단가 낙찰률 적용 적정여부

- 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부 등

○ 위 사항을 검토 및 심의하고 심의 결과에 의거 설계변경 조치

따로붙임 :  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 심의신청서 1부.

3. 설계변경내역서 1부. 끝.

주무관	최용진		급수운영과장	12/05 이계환
협조자	주무관	강대유		주무관	이한수		주무관	代정성식
주무관	이승완
시행	급수운영과-27028	(		)	접수		(		)
우	01137		/
전화	02-3146-3342	/전송	02-3146-3389	/		/	부분공개(7)