문서번호	도로보수과-12066
결재일자	2016.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
권세봉		이규철	12/05 한동근
협조
	주무관		이상하

2016년 횡단보도 확충정비사업

작업완료 보고(서울광장 외 8개소)

2016.  12. 05.(월)

서부도로사업소

(도로보수과)

2016년 횡단보도 확충정비사업

작업완료 보고(서울광장 외 8개소)

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2016년 횡단보도 확충정비사업

○ 위    치 : 중구 소공로 서울광장 앞, 소월로 도동삼거리

중구 세종대로 삼성본관 앞, 세종대로18길 한화갤러리아

중구 장충단로 써미트호텔 앞, 장충단로 국립극장 앞

중구 동대문역사문화공원 앞, 역사문화공원 7번출구

마포구 성산로 성산대교북단

○ 개선내용 : 횡단보도 설치, 노면표시 개선, 보도 설치 등

○ 예산배정 : 107,934천원

□ 작업완료내역

○ 건   명 : 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 작업지시(제14차)

- 시 공 사 : 미성건설(주) 대표 김지성

- 작업기간 : 2016. 08. 12. ~ 2016. 11. 30.

- 공사금액 : 41,549천원(관급포함)

- 작업내역

구 분	당 초	변 경	증·감	증·감 사유	비 고
차선 도색	1,056m	1,033m	감) 23m	실 작업량 증·감에 따른 물량변경	서울광장 외 8개소
문자․기호 도색	1,840m	1,256m	감) 584m
횡단보도 도색	4,420m	3,162m	감) 1,258m
노면표시 제거	3,595m	2,044m	감) 1,551m
합 계	10,911m	7,495m	감) 3,416m

○ 건   명 : 교통안전(도로) 부속물 유지보수공사 작업지시(제7차)

- 시 공 사 : 토형이엔시(주) 대표 김용훈

- 작업기간 : 2016. 10. 04. ~ 2016. 11. 20.

- 공사금액 : 14,211천원

- 주요 작업내역

구 분	당 초	변 경	증·감	증·감 사유	비 고
아스팔트 절단	42m	38m	감) 4m	실 작업량 증·감에 따른 물량변경	성산대교 북단
아스팔트 깨기	4.2㎥	9.1㎥	증) 4.9㎥
콘크리트 깨기	5.25㎥	1.8㎥	감) 3.45㎥
보도블럭 철거	45㎥	28.8㎥	감) 16.2㎥
경계석 철거	10m	10m	-
경계석 설치	42m	36m	감) 6m
L형측구 설치	42m	35m	감) 7m
소형고압블럭 포장	87㎥	67.9㎥	감) 19.1㎥
점자블럭 포장	20㎥	1㎥	감) 19㎥
아스콘중층 포장	0.1a	0a	감) 0.1a
도로표지병 철거	29개	29개	-
도로표지병 설치	29개	29개	-
폐기물 처리	9.5㎥	10.9㎥	증) 1.4㎥
교통통제 및 안전처리	10인	10인	-

○ 공사금액

공 사 명	당 초	변 경	증·감	비 고
노면표시(관급포함)	70,640천원	41,549천원	감) 29,091천원
교통안전 부속물	17,253천원	14,211천원	감) 3,042천원

○ 현장사진

서울광장 앞	도동삼거리

삼성본관앞	한화갤러리아

써미트호텔 앞	국립극장 앞

동대문역사문화공원	동대문역 7번출구 앞

성산대교북단(공사전)	성산대교북단(공사후)

□ 향후계획

○ 상기 보고내용과 같이 실 작업완료분에 대하여 준공 처리.

○ 2016년 횡단보도 확충정비사업 작업완료 통보 및 예산 집행잔액 감배정 요청(교통운영과)

붙 임 : 1. 교통안전시설 유지보수공사 작업완료 내역서 2부.

2. 교통개선사업 작업완료 사진대지 2부.

3. 교통개선사업  작업완료 도면 9부.  끝.