문서번호	정수과-5457
결재일자	2016.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
서홍교		12/05 하은경
협 조
	주무관		박문하

정수시설 청소용역 추진사항 보고

(2016.11, 12월)

2016. 11

암사아리수정수센터

(정  수  과)

정수시설 청소용역 추진사항 보고

(2016. 11, 12월)

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2016년 정수처리시설 청소 및 준설용역

○ 용역기간 : 2016.03.07. ~ 2016.12.23.

○ 용 역 비 : 금189,733,520원

○ 용역업체 : 바론건설(주)[대표 - 이연희, 소재지 - 서울시 성북구]

○ 청소물량 및 횟수

- 정수지 52,522㎡, 응집·침전지 및 여과지 251,174㎡, 토사 준설 100㎥ 등

- 정수지 등 1회, 여과지 2회, 응집·침전지 주벽 1.3회, 침전지 수로 3회

□ 정수처리시설 청소 추진실적(최종)

구분	응집·침전지							여과지					정수지		1차농축조		회수조		침전지 수로
	계	#1					#2	#1				#2	#1	#2	#1	#2	#1	#2	#1	#2
		소계	1계열	2계열	3계열	4계열		1계열	2계열	3계열	4계열
진행률	109.6%							98.1%					100%		100%		50%		101.5%
대상	40	32	8	8	8	8	8	16	16	16	16	16	4	2	2	2	2	2	58	12
계획	52	42					10	128				32	4	2	4	4	2	2	106	26
실적	57	44	11	11	12	10	13	32	31	31	31	32	4	2	4	4	2	-	108	26

□ 향후계획

○ 청소추진 실적 사진, 보험 등 각종 증비서류 확인(바론건설-주)

○ 2016년 정수처리시설 청소용역 설계변경 추진

- 청소물량 증감, 각종 보험 등 변경사항 반영

○ 정수처리시설 청소용역 준공처리(‘16.12.23.한)

붙임 : 청소추진 실적(11,12월) 및 결과(최종) 각 1부. 끝.