투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경 계약 - 관급자재 수량변경 요청 (뚝섬공원 친환경 주차장 조성공사)

1. 기반시설과-5009(2016.12.1.)호와 관련입니다.

2. 기반시설과에서 추진중인 ｢뚝섬공원 친환경 주차장 조성공사｣ 관급자재에 대해 아래와 같이 수량변경 요청이 있어 변경계약하고자 합니다.

가. 수량변경 요청내역

납품 요구번호	품명	규격	물품 식별변호	단위	당초		변 경		증 감
					수량	금액	수량	금액	수량	금액
12-16-1-46526-00	잔디블록	198*198*80	22362356	㎡	4,128	67,286,400	3,970	64,711,000	감)158	감)2,575,400
12-16-1-56569-00	디자인울타리	2000*1000	22303826	m	104	17,784,000	92	15,732,000	감)12	감)2,052,000
12-16-1-54099-01	레미콘	25-18-80	10063090	㎥	35	1,962,450	25	1,457,500	감)10	감)504,950
12-16-1-56583-01	아스콘	기층,bb-2, 3등급	22535498	톤	156	7,077,720	104	4,718,480	감)52	감)2,359,240
12-16-1-56583-01	아스콘	표층,wc-2,3등급	22535420	톤	104	5,279,040	156	7,918,560	증)52	증)2,639,520

나. 변경사유 : 소요물량 변경 정산

붙  임 : 변경요청 공문 1부.  끝.

주무관	최유섭		총무과장	12/05 박병현
협조자
시행	총무과-21424	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 성동구 강변북로 257, 한강사업본부 총무과 (성수동1가 642-25번지)	/
전화	3780-0713	/전송	3780-0740	/	yschoi21@seoul.go.kr	/	부분공개(5)