“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	상암택지개발지구 개발계획 및 실시계획 변경 승인고시

1. 서울주택도시공사 택지계획부-4878호(2016.12.5.)와 관련입니다.

2. 우리시에서 시행하고 있는 상암택지개발사업과 관련하여 대행사업자인 서울주택도시공사로부터 사업기간 연장을 위한 상암택지개발사업 개발계획 및 실시계획 변경승인 신청이 있어,

3. 택지개발촉진법 제8조, 제9조 및 시행령 제7조, 제8조에 따라 상암택지개발지구 개발계획 및 실시계획 변경을 승인하고 이를 붙임 고시문과 같이 고시코자 합니다.

가. 변경내용 : 6, 7공구 사업기간(준공일) 연장

구 분	사 업 준 공 일
	1공구	2공구	3공구	4공구	5공구	6공구	7공구
기 정	2012.06.30 (사업준공)	2006.12.31 (사업준공)	2010.01.31 (사업준공)	2011.12.31 (사업준공)	2012.06.30 (사업준공)	2016.12.31	2016.12.31
						2017.12.31	2017.12.31
변 경

나. 연장사유 : 일부 공사 진행중(진입도로 개설)으로 인한 사업기간 부족

국·공유지 수용협의 지연에 따른 사업기간 부족

붙임 : 고시문(안) 1부.  끝.

주무관	최영		택지개발팀장	김준표		임대주택과장	12/06 임인구
협조자	주무관	장천섭		신문팀장	박경환		법제심사팀장	최승호
시행	임대주택과-15261	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가) 서울시청 3층 임대주택과	/
전화	02-2133-7081	/전송	02-2133-0756	/		/	부분공개(5)