문서번호	급수운영과-29973
결재일자	2016.12.6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
전성호		김찬모	12/06 代김찬모
협조

설계변경 심의 소위원회 개최결과 보고

2016.12

서부수도사업소

(급수운영과)

설계변경 심의 소위원회 개최결과 보고

Ⅰ		공사개요

공 사 명 : 2016년 서부수도 관내 포장도로 굴착복구공사(단가계약)

공사규모 : 아스팔트 포장 169.8a, 콘크리트 포장 1.75a, 보도블록 포장 16.58a,

아스팔트표층포장 224.68a

공사기간 : 2016.10.07. ~ 2016.11.30.

총공사비 : 1,714,224,600원(도급비 : 1,368,363,600 관급비 : 345,861,000)

계약상대자 : 라텍씨앤씨(주) 대표 박기춘

감 리 자 : 서울특별시 시설관리공단, ㈜이준엔지니어링

Ⅱ		주요 변경사항

공사현장 여건변화 등으로 인한 신규공종 및 복구물량 증,감에 따른 변경

(내역서 참조)

ㆍ토  공 : 포장절단 물량 외 23공종 증.감

ㆍ포장공 : 보조기층공 물량 외 77공종 증.감

ㆍ부대공 : 소형공사안내 설치 철거외 21공종 증.감

ㆍ사급자재 : 보조기층재 외 5공종 증.감

세부내용

공 종	단위	당 초	변 경	증․감
아스팔트 포장	a	169.80	139.76	감)30.04
콘크리트 포장	a	1.75	1.78	증) 0.03
보도블럭 포장	a	16.58	13.65	감) 2.93
아스팔트표층포장	a	224.68	253.44	증)28.76
계		412.81	408.63	감) 4.18

세부내용 내역 : 금액변동 없음

구 분	총 부 기 금 액		1 차 계 약 금 액		2 차 계 약 금 액
	당 초	변 경	당 초	변 경	당 초	변 경
총공사비	1,714,224,600	1,714,224,600	1,200,554,700	1,483,265,700	513,669,900	230,958,900
도 급 비	1,368,363,600	1,368,363,600	958,452,000	1,241,163,000	409,911,600	127,200,600
관 급 비	345,861,000	345,861,000	242,102,700	242,102,700	103,758,300	103,758,300

Ⅲ		조치의견

위와 같이 물량증감건에 대해 적정성 여부 등을 계약금액조정 심의위원회   심의결과 적정하게 변경된 것으로 검토되어 원안 가결된바, 설계변경        재계약후 공사시행에 만전을 기하고자 합니다

따로붙임 : 1. 설계변경 심의 위원회 개최 및 설계변경 보고서 1부

2.. 설계변경내역서 및 심의의결서 각 1부.  끝.