보고서(공사 실정보고)

주무관	시설관리과장			결재
박상권	12/06 代박미영
협 조

문서번호 :	시설관리과-24984

우리사업소에 시행하는 【미아동1264-111~1261-358외 10개소 배급수관정비공사】시행중 시설공단에서 아래와 같이 실정보고가 있어 그 검토의견을 보고합니다.

현 황

○ 관련근거 : 시설관리공단 공사감독2처-16729호

○ 내    용 : 공사실정보고(폐기물량 증가)

보고내용

○ 우리 사업소에서 시행중인 【미아동1264-111~1261-358외 10개소 배급수관정비공사】   와 관련, 1구간(미아동 43-8~42-117)시행중 일부구간 폐기물 증가에 대한

시설관리공단 실정보고임

○ 실정보고 내용

구분	실정보고	검토의견
***	도로포장 두께가 t=45㎝로 확인됨	- 포장두께 증가에 따라 포장깨기물량 감소 및 터파기물량을 실시공 물량으로 정산 (포장깨기 증76㎥,터파기량 감76㎥) 폐기물용역 운반 및 처리물량에 반영
****	도로포장 두께가 t=40㎝로 확인됨	- 포장두께 증가에 따라 포장깨기물량 감소 및 터파기물량을 실시공 물량으로 정산 (포장깨기 증16㎥,터파기량 감16㎥) 폐기물용역 운반 및 처리물량에 반영

○ 도면 및 현장사진

3구간 D=150mm, L=400m
3구간 아스팔트 도로 : L=400m	ASP:t=10cm, CON'C:t=35cm (적용:t=45cm)

10구간(교체) D=100mm, L=110m
10구간 아스팔트도로 : L=110m	ASP:t=5cm, CON'C:t=35cm (적용:40cm)

○ 상기와 같이 시설관리공단에서 보고한  도로포장 두께 증가에 따른 물량증감

사항을 설계변경에 반영코자 합니다.

행정사항

○ ***********************************************************************************************************************

※ 소요예산 : 증)3,718천원

예산비목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비, 노후상수도관정비

별 첨 : 공사실정 보고 1부. 끝.