투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	서울지방국토관리청장(하천계획과장)
(경유)
제목	한강 관광자원화 사업 예산집행 협의

1. 하천계획과-3149호(2016.08.01)  및 치수과-3882호(2016.11.02)와 관련입니다.

2. 귀청과 협력하여 추진하고 있는 “한강관광자원화 사업” 중 “한강공원 나들목 증설공사(개화)”의 원활한 사업추진을 위해 아래와 같이 집행잔액(낙찰차액) 사용 하고자 협의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

가. 협의내용 : 한강공원 나들목 증설공사(개화) “공사추진방법 변경” 을 위한 집행잔액(낙찰차액) 사용

나. 집행잔액(낙찰차액) 사용사유

1) 올림픽대로 제방 관통을 위해 강관추진(비개착공법 적용)시 기존 개화나들목 접속스라브(7.5m×26m×0.45m, 철근콘크리트)가 저촉되어 공사추진 방법 변경을 위한 소요비용 증액사유 발생

다. 소요비용 : 금353,100천원 (무진동 철근콘크리트 깨기 적용)

1) 소요예산 조치 : 한강관광자원화사업 설계용역 집행잔액(낙찰차액) 중

금 160,000천원 사용. 끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	김동식		치수과장	12/06 신용철
협조자
시행	치수과-4277	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25)	/
전화	02-3780-0687	/전송	02-3780-0744	/		/	대시민공개