투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연기 요청

1. 물품계약서(분할납품요구 및 통지********64100)와 관련입니다.

2. 우리부에서 추진 중인『서울지하철 9호선 3단계 궤도공사(2공구)』에 소요되는 관급자재(레미콘)의 납품기한을 아래와 같이 변경 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

〇 납품기한 연기 요청 현황

품 명	납품요구번호	규 격	단위	수량	납 품 기 한		비고
					당 초	변 경
레미콘	121613964100	25-30-120	㎥	3,800	‘16.12.20.	‘17.03.31.

※ 납품기한 연기 사유 : 사용시기 미도래.  끝.

	도시철도토목부장
주무관	최경호		궤도과장	최진규		도시철도토목부장	12/06 김진팔
협조자	주무관	성원배
시행	도시철도토목부-15225	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)프리미어플레이스 9층	/
전화	772-7243	/전송	772-7306	/	ckh4815@seoul.go.kr	/	대시민공개