문서번호	교육지원과-11634
결재일자	2016.12.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		평생교육팀장		교육지원과장		행정관리국장
이혁희		배경득		엄원식		12/06 박기웅
협조
	예산팀장		이정희

★ ◉

독서당 인문아카데미센터(평생학습관)

건립예산 사고이월 계획

성  동  구

(교육지원과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 □ 공약(약속)사업 □ 계속사업 ☑ 인센티브/공모사업 □
소통분야 고려사항		●	구민		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	전문가		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자		:		유 □ ( ) 무 ☑
여성친화 도시		성 평 등 □ 안 전·편 의 □ 가 족 · 공 동 체 회 복 □ 여 성 참 여 □
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 □ 유지비용 □ 바른 공공언어 □
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:		유 ☑ ( 문화체육관광부 ) 무 □
		●	서울시	:		유 ☑ ( 문화시설과 ) 무 □
		●	기업	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:		유 □ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 □
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

독서당 인문아카데미센터(평생학습관)

건립예산 사고이월 계획

인문문화정신 확산 및 평생교육 기반 구축을 위해 추진하는 독서당 인문아카데미센터(평생학습관) 건립 사업과 관련 보조금 교부 및 심의 일정 지연 등으로 미 집행된 예산을 2017년으로 사고이월하여 집행 하고자 함

Ⅰ		추진근거

○ 구청장 약속사업 No.44(금호유수지 내 평생학습관 건립)

○ 독서당 인문아카데미센터 신축공사 시행계획(구청장 방침 제415호, ’16. 12.5.)

Ⅱ		사업개요

○ 사 업 명: 독서당 인문아카데미센터(평생학습관) 건립

○ 기    간: 2016. 1. ~ 2017. 6.

○ 위    치: 성동구 금호동4가 56(금호유수지 내)

○ 규    모: 대지면적 7,839㎡, 연면적 786.21㎡, 지상2층

○ 사 업 비: 2,500백만원 (시설비 2,430백만원, 자산취득비 70백만원)

- 2015년 사고이월액: 300,000천원 (2016년 연도내 집행 완료 예정)

- 2016년 예산배정액: 2,200,000천원

※ 특별교부세 600,000천 원 포함 (교부일: 2016. 11. 11.)

Ⅲ		추진경위

○ ’16.  2. 16.: 독서당 인문아카데미센터(평생학습관) 건립계획 수립

○ ’16.  3. 24. ~　12．2.: 기본 및 실시 설계용역

○ ’16.  6. 28.: 구의회 공유재산 관리계획 변경안(원안가결)

○ ‘16.  8. 24.: 區 투자심사위원회 심의(적정)

○ ’16. 10.  6.: 市 도시계획위원회 심의(조건부가결)

○ ’16. 11.  9.: 市 건축위원회(경관분야) 심의(조건부가결)

○ ’16. 12.  1.: 市 계약심사 결과 수신

○ ’16. 12.  5.: 독서당 인문아카데미센터 신축공사 시행계획 수립

Ⅳ		사고이월 세부내용

사고이월 내역

○ 사고이월액: 총 2,200백만원(국 1,000백만원, 시 600백반원, 구 600백만원)

○ 이월 세부내역

구 분	예산현액(A) ('16이월비제외)	배정액(B)	지출원인 행위액(C)	지출액 (D)	사고이월액 (E)	집행잔액 (A-(D+E))
계	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	-	2,200,000,000	0
시설비	2,130,000,000	2,130,000,000	2,130,000,000	-	2,130,000,000	0
자산취득비	70,000,000	70,000,000	70,000,000	-	70,000,000	0

○ 예산과목

- 교육지원과, 평생학습체제 구축, 평생학습 활성화, 독서당 인문

아카데미(평생학습관) 건립, 시설비및부대비, 시설비(201-03)

- 교육지원과, 평생학습체제 구축, 평생학습 활성화, 독서당 인문

아카데미(평생학습관) 건립, 자산취득비, 자산및물품취득비(405-01)

사고이월 사유

○ 보조금 교부 일정 및 각종 심의 일정 지연으로 공사 준공기한 연장

- 국비 및 특별교부세 등 보조금 교부 일정 지연과 市 도시계획심의,          市 건축위원회(경관분야) 심의 등 각종 심의 일정의 지연으로            인해 2016년도내 사업집행 완료가 어려운 점을 감안, 원활한  사업          추진을 위하여 시설비 및 자산취득비를 사고이월하고자 함

Ⅴ		향후계획

○ ’17.  2. ~ 5.: 통신, 소방, 인테리어 등 공사 단계적 발주 시행

○ ’17.  5. ~ 6.: 공사 준공 및 개관

Ⅵ		행정사항

○ 전산입력(e-호조) 및 사고이월 요구서 제출.   끝.