문서번호	설비부-19001
결재일자	2016.12.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	건축설비과장	설비부장
김현숙	김영수	12/06 권오식

『시립영보정신요양원 증축 및 리모델링 전기,소방 감리용역』

설계변경 검토 보고

2016. 12.

도시기반시설본부 설비부

『시립영보정신요양원 증축 및 리모델링 전기,소방 감리용역』

설계변경 검토 보고

『시립영보정신요양원 증측 및 리모델링 전기,소방 감리용역』의 설계변경이 발생하여 책임감리원으로부터 보고받은 사항에 대한 검토결과를 보고드립니다.

관련근거

○ 일강 제16-152(2016.12.02.)호  <전기 상주감리 투입계획 변경 요청>

용역개요

○ 용 역 명 : 시립영보정신요양원 증축 및 리모델링 전기,소방 감리용역

○ 공사규모

- 증축 지하1층~지상4층(1,552.28㎡), 리모델링 800.71㎡

- 수변전설비(500KVA), 전등·전열 설비, 태양광발전 설비 등

○ 업 체 명 : 일강엔지니어링(주)

○ 용역기간 : 2016.03.02.~2017.04.05.

○ 용 역 비 : 계약)70,034,710원   변경)76,945,200원

○ 도 급 사 : 송주전기(주)

설계변경 현황

○ 변경금액                                                       (단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
합계	70,034	76,945	+ 6,910
전기	59,529	66,440	+ 6,910
(인건비)	27,717	30,951	+ 3,234
(제경비)	23,163	25,844	+ 2,681
(경비)	2,851	3,175	+ 324
(보험료)	384	429	+ 45
소방	10,500	10,500	+ 0	변동없음

○ 설계변경 사유

- 운영기관 추가 요청사항 및 노후 전기설비 교체 물량 증가로 감리 대상 공사비가 증가하게 되어 상주감리 투입계획이 변경되었음.

○ 투입계획 현황

변경 전	변경 후
2016년 11월, 12월 투입 예정	2016.12.05.~2017.01.21.

○ 공사비 변경 내용

- 설비부-10760(2016.07.07.)호 실정보고 사항 검토 보고

구 분	변경사항	비 고
리모델링)전력간선설비	노후 분전반 교체
리모델링)전등설비	노후 스위치, 전등기구, 배관배선 교체
리모델링)소방 유도등설비	유도등 7등 신설
관급자재 증가	분전반 4면, LED조명 239등 추가
총 공사비	도급비 49,039,490원 증 관급자재 31,244,860원 증

보고자 검토의견

○ 검토결과 적정한 것으로 판단되어 본부 건설총괄부에 계약변경을 의뢰하고자 합니다.

붙 임 : 1. 설계변경 합의서 1부.

2. 감리단 실정보고 1부.  끝.