투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	2016년 한강공원 망원수영장 공사 시행 확인 요청

1. 2016년 한강공원 망원수영장 배관 누수로 인한 공사시행으로 수영장 개장일이 늦어짐에 따라 수탁자가 1일 사용료 반환을 요청해온 바,

2. 이에 대하여 반환 여부를 검토하고자 운영기간 중 공사 시행 확인사항을 요청하오니 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 망원수영장 운영기간 : 2016. 6. 24. ~ 8. 22.

※ 2016. 6. 24. 수영장 메인배관 누수공사로 개장 1일 지연

나. 확인사항 : 2016. 6. 24.자 공사시행 사실 여부 확인

- 공사계획, 공사결과보고서, 공사기간 중 현장확인서류 등

붙임 : 망원수영장 사용료 반환건 법률자문결과 1부. 끝.

	공원기획과장
수신자	기전설비과장,기반시설과장
주무관	박현		공원기획과장	12/07 윤병헌
협조자
시행	공원기획과-4318	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가)	/
전화	02-3780-0842	/전송	02-3780-0745	/		/	부분공개(5)