문서번호	토목부-25169
결재일자	2016.12.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
지풍근		권혁대	12/07 김영수
협조
	주무관		이정원

중랑천 둔치 잔디 식재 계획

(겸재교 건설 및 연결도로 확장공사)

2016.12.

도시기반시설본부

(토목부)

중랑천 둔치 잔디 식재 계획

(겸재교 건설 및 연결도로 확장공사)

겸재교 건설 공사구간내 저촉된 중량천 둔치 게이트볼장 이전후 부지의 환경 및 도시미관이 저해되어 둔치 기능회복을 위해 잔디 식재 계획 검토 보고임

Ⅰ		관련근거

○ 중랑구 치수과-12414호(2016.11.8.)

- 겸재교 승강기 설치에 따른 업무협조 요청

○ 동일감 제16-264호(2016.12.5.) 실정보고 제출

- 중랑천 둔치 구간 잔디식재 검토보고

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : 겸재교 건설 및 연결도로 확장공사

○ 공사위치 : 동대문구 휘경동 휘경여중고 ~ 중랑구 면목동 동일로 사거리

○ 공사규모

- 본교량   : B=18.24m, L=235m(Extra Dosed교)

- 접속교량 : B=9m, L=160m, 접속램프 2개소  - 도로확장 : B=20m → 30m, L=750m

○ 공사기간 : □08.10.23.∼ □16.12.31.

○ 도 급 비 : 31,006백만원

○ 감 리 단 : ㈜동일기술공사 외 1개사  ○ 시 공 사 : ㈜한진중공업 외 1개사

○ 공 정 률 : 96%

Ⅲ		보고내용

□ 겸재교 중랑천 둔치 잔디 식재

○ 겸재교 공사 구간내 저촉된 중랑천 둔치 게이트볼장 이전후 기존 부지가 환경 및 도시미관 저해되어 둔치 기능회복을 위해 잔디 식재

- 식재 규모 : 22[eqn: m]×18[eqn: m]=396[eqn: m^{ 2}]    - 잔디 규격 : 0.3[eqn: m]×0.3[eqn: m]×0.03[eqn: m]

〈위치도〉

중랑천 둔치

〈현황사진〉

〈수량현황〉

구 분	규 격	단 위	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
식재면 고르기		[eqn: m^{ 2}]	-	396	396
잔디	0.3[eqn: m]×0.3[eqn: m]×0.03[eqn: m]	[eqn: m^{ 2}]	-	396	396

〈공사비 현황〉

(단위:천원 VAT포함)

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
부대공
식재면 고르기	-	366	366
잔디	-	2,377	2,377
직접공사비	-	2,743	2,743
제경비	-	620	620
공급가액	-	3,364	3,364
부가세	-	336	336
도급액	-	3,700	3,700

- 적용단가 검토

․ 기존비목 : 공사계약일반조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) ①항 1호에

의거 계약단가 적용

․ 신규비목 : 공사계약일반조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) ②항에                   의거 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰률을 곱한 금액 적용

Ⅳ		조치계획

○ 중량천 둔치 기능회복을 위해 기존 게이트볼장 부지 잔디식재는 적정함으로 향후 설계 변경시 반영하고자 함

붙임 : 1) 감리단 검토 의견서 1부.  끝.