투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경 계약 - 관급자재 수량 감량 요청 (레미콘-하천시설 유지관리 및 개선공사)(2)

1. 시설관리과-4061(2016.12.6.)호와 관련입니다.

2. 시설관리과에서 추진중인 ｢하천시설 유지관리 및 개선공사｣ 관급자재에 대해 아래와 같이 수량변경 요청이 있어 변경계약하고자 합니다.

가. 수량변경 요청내역

납 품 요구번호	품명	규격	물품 식별변호	단위	당초		변 경		증 감
					수량	금액	수량	금액	수량	금액
12-16-1-21021-01	레미콘	25-21- 120	10063096	㎥	280	17,637,200	238	14,991,620	감)42	감)2,645,580
	조달수수료					90,470		80,950		증)9,520
	합계					17,727,670		15,072,570		감)2,655,100

나. 변경사유 : 소요물량 감량

붙  임 : 변경요청 공문 1부.  끝.

주무관	최유섭		총무과장	12/07 박병현
협조자
시행	총무과-21641	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 성동구 강변북로 257, 한강사업본부 총무과 (성수동1가 642-25번지)	/
전화	3780-0713	/전송	3780-0740	/	yschoi21@seoul.go.kr	/	부분공개(5)