함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(2016년 유량계 교정검사 및 유지보수 용역)

1. 우리 본부에서 시행 중인 『2016년 유량계 교정검사 및 유지보수용역』에 대하여 다음과 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 사업개요

1) 용 역 명 : 2016년 유량계 교정검사 및 유지보수용역

2) 계약업체 : 그린플로우㈜ 대표 송행숙(TEL:031-459-0674)

3) 계약금액 : 금295,887,000원(금이억구천오백팔십팔만칠천원정)

4) 계약기간 : 2016. 04. 01.~2016. 12. 31.

나. 설계변경 내용 : 과업지시 물량 증․감에 따른 계약금액 조정(감액)

구 분		변 경 사 항			비 고
		당 초	변 경	증․감
도급비	용 역 원 가	268,988,182	246,124,108	△22,864,074	********** ***********
	부가가치세	26,898,818	24,612,411	△2,286,407
	계	295,887,000	270,736,100	△25,150,900
공사기간		‘16.04.01~’16.12.31	좌 동	-

다. 변경사유 : 유량계 신설, 운휴로 인한 교정검사, 시설점검, 웹(WEB)수정 등 과업지시 물량 증․감에 따른 변경

라. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비, 배급수비, 수선유지교체비(기타교체비)

붙임 : 1. 설계변경(정산) 보고서 1부.

2. 변경설계서 및 월별 용역 준공내역 각 1부.

3. 합의각서 1부.  끝

★주무관	차경호		누수방지과장	김영삼		시설안전부장	12/07 강신재
협조자	주무관	배현진		주무관	김윤환
시행	누수방지과-12013	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	3146-1513	/전송	3146-1529	/	chagho@seoul.go.kr	/	부분공개(5)