	서울대공원
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	설계변경(제2회) 계약의뢰-2016년 토목시설물 유지보수공사(연간단가)

1. 서울대공원 시설과-8311(2016.12.07)호와 관련입니다.

2.『2016년 토목시설물 유지보수공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(제2회) 계약의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공사명 : 2016년 토목시설물 유지보수공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2016. 3. 4 ～ 2016. 12. 31

다. 도급자 : (주)국방건업 대표 강민식

라. 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
총공사비	490,000,000원	490,000,000원	0원
도급비	490,000,000원	490,000,000원	0원

마. 설계변경사유

(1) 당초 예정물량으로 설계되어 실제시공에 따른 물량변경 및 공종추가

(2) 제경비 등 준공정산

붙임 : 1.  설계변경 내부결재 시행문 1부.

2. 설계변경 검토 보고서 1부.

3.  설계변경 내역서 1부.

4. 설계변경사유서 1부.

5. 합의각서 1부. 끝.

	서울대공원장
전문관	서동민		시설과장	전결 12/07 공헌구
협조자	주무관	이상국		계약1팀장	조현
시행	시설과-8315	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102 (막계동) 시설과	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	500-7412	/전송	507-7230	/	baekgu2@seoul.go.kr	/	부분공개(5)