함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	설계변경 계약의뢰

1. 우리 사업소에서 시행중인  『2016년 서부수도 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(3차)을 시행하고 계약의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2016년 서부수도 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)

나. 계약상대자 : 라텍씨앤씨(주) 대표 박기춘

다. 계약기간 : 2016.05.20 ~ 2017.6.30

1차수계약기간 : 2016.05.20. ~ 2016.12.31

2차수계약기간 : 2017.01.01. ~ 2017.6.30.(2017년 2차수변경)

구 분		당 초	변 경	비 고
총 공 사 비		1,714,224,600	1,714,224,600
도 급 액	금차	958,452,000	1,241,163,000	증 282,711,000
	총차	1,368,363,600	1,368,363,600	-
관 급 자 재 비		345,861,000	345,861,000	-

라. 설계변경사유 : 공사현장 여건변화등으로 신규공종 발생 및         복구물량  증·감에 따른 변경

마. 예산과목 :상수도사업비용, 영업비용, 급수공사비, 신설공사비

상수도사업비용, 영업비용, 급수공사비, 개조공사비

자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비

상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비

재난시스템구축,소방용수시설관리,소방용수시설등의설치                              및 관리 소방용수시설보수,시설비 및 부대비

재난시스템구축,소방용수시설관리,소방용수시설등의설치                              및 관리 소방용수시설보수,시설비 및 부대비

바. 차수별 금액 변경 내역

구 분	총 부 기 금 액		1 차수 계 약 금 액 (2016.05.20.~2016.12.31.))		2 차수 계 약 금 액 (2017.01.01.~2017.06.30)
	당 초	변 경	당 초	변 경	당 초	변 경
총공사비	1,714,224,600	1,714,224,600	1,200,554,700	1,483,265,700	513,669,900	230,958,900
도 급 비	1,368,363,600	1,368,363,600	958,452,000	1,241,163,000	409,911,600	127,200,600
관 급 비	345,861,000	345,861,000	242,102,700	242,102,700	103,758,300	103,758,300

따로붙임  1. 설계변경심의위원회 개최결과 관련서류 및 시행문 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의서 1부. 끝

	서부수도사업소장
주무관	전성호		급수설비팀장	김찬모		급수운영과장	12/07 박길영
협조자
시행	급수운영과-30144	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41	/
전화	3146-3673	/전송	3146-3689	/	jeonho32@seoul.go.kr	/	부분공개(7)