문서번호	시설과-4799
결재일자	2016.12.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	조경시설팀장	시설과장		서부공원녹지사업소장
정순주	이용원	임병국		12/07 오진완
협 조

『2016 월드컵공원 무장애 친화공원 조성사업 폐기물 처리용역』실정보고

2016. 12

서부공원녹지사업소

[ 시 설 과 ]

『2016 월드컵공원 무장애 친화공원조성사업』

폐기물 처리용역 실정사항 보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

『월드컵공원 무장애 친화공원 조성사업』폐기물 처리용역에 대한 실정사항을 다음과 같이 보고 드림.

Ⅰ		용 역 개 요

□ 용 역 명 : 2016 월드컵공원 무장애 친화공원 조성사업 폐기물 처리용역

□ 공사기간 : 2016. 10. 11 ~ 12. 10

□ 내    용 : 폐기물운반 및 처리 231ton(폐콘크리트 209, 폐아스콘 14, 혼합폐기물 8)

□ 도 급 액 : 금4,956,430원

□ 도 급 자 : ㈜ 건용환경개발 대표 김영철

Ⅱ		실정보고 검토내용

□ 실정 보고사항

구분	보 고 사 항	검 토 내 용	비 고
배수공	►2016년 무장애 친화공원 조성사업 현장여건 상 노후 파고라 철거 및 앉음벽등 철거에 따라 폐기물량 증가	► 아스팔트포장철거물량 증가 - 폐아스콘 2.009ton →4.218ton ► 파고라 철거 1개소 - 폐콘크리트 0ton →1.1ton - 혼합폐기물 0ton →1.12ton ► 앉음벽철거 1개소 - 폐콘크리트 0ton →1.27ton ► 폐기물 운반 - 건설폐기물 운반 223ton →227ton - 혼합폐기물운반 8ton→9ton	승인 (본공사 물량증가)

Ⅲ		변경금액(개략공사비)

구 분	금 액 (원)		증 감
	변 경 전	변 경 후
용역비계	4,956,430	4,956,430	증128,040
공급가액	4,505,846	4,622,246	증116,400
부 가 세	450,584	462,224	증11,640

※ 세부내역 : 따로붙임.

Ⅳ		보 고 의 견

□ 2016무장애 친화공원 조성공사 철거물량 증가에 따른 폐기물 처리물량이 증가 된 사항으로 설계에 반영처리함이 타당하며,

□ 증가 된 용역비 128,040원에 대해서는 2016년 무장애 친화공원 조성  사업에서 발생한 관급자재 차액을 사용코자 함.

붙임 : 변경내역서 및 폐기물집계표 1부.  끝.