“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	성미산마을
(경유)
제목	에너지자립마을 조성사업 계획 변경 승인(성미산마을)

1. 성미산마을-1(2016.12.2.)호와 관련입니다.

2. 귀 마을에서 신청한‘16년 에너지자립마을 조성사업 계획에 대한 내용변경을 아래와 같이 승인하오니 사업추진에 만전을 기해 주시고, 아울러 보조금관리시스템 세부사항 변경과 보조금 정산 및 자부담 예산집행에도 철저를 기해주시기 바랍니다.

〇 사 업 명 : 성미산 에너지전환마을 만들기

〇 총사업비 : 금34,850,000원(보조금 24,000,000원, 자부담 10,850,000원)               〇 변경승인 내용(보조금 총액 동일)

- 미니태양광설치 보조금으로 5,000,000원(100,000원*50가구)을 책정하였으나 마포구청 보조금으로 일부 지원함에 따라 예산 절감비용, 에너지자립마을 3년차로 마을우수사례 주민 홍보비용 반영(230만원)

- 공간운영활동비 일부를 전환마을사랑방 및 에너지전환센터 교육비용    으로 조정 반영(200만원)

〇 변경사업비 승인내역

(단위: 원)

세부사업명	예산비목		당초예산 (A)	변경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경예산 산출내역
공통	공간운영활동비	보조금	3,200,000	1,200,000	감 2,000,000	-지출 불필요
마을에너지교육	시설비 (시설공사비)	보조금	5,000,000	2,700,000	감 2,300,000	-61가구 지급대상자중 27가구만 지급
전환마을사랑방	사업운영비 (소모성물품구입비)	보조금	2,000,000	3,000,000	증 1,000,000	워크숍 공구 구입 LED스탠드 만들기 햇빛 저금통 미니태양광 핸드폰 충전기
에너지전환센터	사업운영비 (소모성물품구입비)	보조금	3,000,000	6,900,000	증 1,000,000	워크숍 공구 구입 LED스탠드 만들기 햇빛 저금통 미니태양광 핸드폰 충전기
마을에너지교육	사업운영비 (활동성경비)	보조금	1,300,000	3,600,000	증 2,300,000	전환위크, 보고서작가, 편집 디자인비

※ 따로붙임 : 사업계획 변경 신청, 승인 및 후속조치 안내 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
★주무관	이수진		에너지공동체팀장	김연지		에너지시민협력과장	12/08 정희정
협조자
시행	에너지시민협력과-12890	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	02-2133-3588	/전송	02-2133-1021	/	idips4010@seoul.go.kr	/	대시민공개