문서번호	설비부-19162
결재일자	2016.12.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
양성구		김창균	12/08 권오식
협조

『마포석유비축기지 재생 및 공원조성 기계설비공사 1차』

준공기한 연기 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

도시기반시설본부

(설비부)

『마포석유비축기지 재생 및 공원조성 기계설비공사 1차』

준공기한 연기 검토보고

「마포석유비축기지 재생 및 공원조성 기계설비공사」관련, 건설사업관리기술자로부터 제출된 준공기한 연기요청 건에 대하여 검토하고 보고 드림.

□  공사개요

공 사 명 : 마포 석유비축기지 재생 및 공원조성 기계설비공사

위    치 : 서울특별시 마포구 성산동 산53-1번지 일대

규    모 : 탱크 5개소 리모델링, 탱크 1개소 및 지원시설 신축

연면적 101,510㎡

감 리 사 : ㈜무영건축사사무소 외 1개사

시 공 사

구 분		기계설비공사	비고
계 약 자		㈜동보엔지니어링외2
공사기간	총차	`15.12.28~`17.04.27
	1차	`15.12.28~`16.12.29
계약금액 (원)	총차	2,055,359,900
	1차	370,000,000

□  검토배경

마포감 제2016-295호(`16.12.7) : 1차공사 준공기한 연기 요청

□  준공기한 연기 검토 ( 1차공사 )

검토내용

구 분	준 공 기 한			연기사유
	당초	변경	증·감
기계설비공사(1차)	`16.12.29	`17.4.27	증) 119일	선행공정인 건축공사 골조공정의 지연에 따라 설비분야 준공기한 연기

‣ 선행공정(건축분야) 지연사유

- 설계도서 미확정(4번탱크 설계변경 등)

건설사업관리기술자 검토의견

‣ 선행공정(건축)이 지연됨에 따라 후속 공정인 기계설비공사(1차)의 준공기한의 연기가 필요함.

□  보고자 의견

주공종(건축)과 연계하여 원활한 사업추진을 위해 연기하는 사항으로서 건설사업관리기술자의 검토내용이 타당하므로 1차공사 준공기한을 연기조치 하고자 함.

붙임  건설사업관리기술자 검토의견서 1부.  끝.