문서번호	조경지원과-7134
결재일자	2016.12.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		조경지원과장	동부공원녹지사업소장
김태순		김제중	12/08 이춘희
협조
	공원운영과장		서동선

작은 결혼식을 위한

시민의숲 정비공사 시행 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

조 경 지 원 과

작은 결혼식을 위한

시민의숲 정비공사 시행 계획

푸른도시국 작은결혼식 TF와 관련하여 시민의숲에 결혼식장을 시범조성하기 위한 설계를 완료하고 공사를 시행하고자 함

Ⅰ		추진근거

□  『서울특별시 작은 결혼식 TF』 회의 결과 (2016.11. 3. 푸른도시국장 최종 결정)

□  시공원보수정비 사업비 지원(추가)계획 {공원녹지정책과-16177호(2016.10.17.)}

< 작은 결혼식 TF >

- 추진배경

· 고비용․체면중시 결혼문화를 지양하고 새로운 결혼문화를 만들어 감

· 작지만 뜻 깊은 예식을 통하여 결혼의 참된 의미에 대한 공감대 확산

- 구   성

· 푸른도시국장, 공원녹지정책과 공원녹지정책팀장, 공원녹지정책과 및 공원조성과 주무관

· 동부공원녹지사업소 조경지원과 및 공원여가과 주무관

- 운   영 : 2016.9.~11.

- 주요내용

· 작은 결혼식장 대상지 선정 및 조성(안) 결정

· 민간협력 방법 논의

· 추진방법 결정(시행 및 운영–동부공원녹지사업소, 홍보 및 민간협력-공원녹지정책과)

Ⅱ		공사개요

□  공 사 명 : 작은 결혼식을 위한 시민의 숲 정비공사

□  규    모 : 1,300㎡

□  공사기간 : 2016. 12. ~ 2017. 4.
□  공사금액 : **********************************************

□  예산과목 : 푸른도시국 공원녹지정책과, 공원녹지 정책개발 및 만족도 개선, 공원녹지 관리 및 이용활성화, 시공원 유지관리 및 보수정비 (도시개발특별회계), 시설비

□  공사내용

○ 식재공사 : 쥐똥나무 외 1종 231주 이식, 화살나무 550주 식재

○ 시설물공사 : 파라솔 6개소, 가제보 1개소, 야외테이블 설치 및 물품보관소 설치 등

○ 포장공사 : 차도용 블록 70㎡, 보도용 블록 24.6㎡ 설치 등

○ 배수공사 : 트랜치 52.23m 설치, 집수정 1개소 설치 등

○ 철거공사 : 목재휀스 28경간, 보도블록 60.0㎡ 등

□  추진 경위

○ 2016.  9. 20. ~ 11. 3.작은 결혼식 TF 구성 및 운영

○ 2016. 11.  3. 작은 결혼식 추진 계획 수립

○ 2016. 11.  7. 기술용역타당성 심사 완료

○ 2016. 11.  8. 실시설계용역 발주

○ 2016. 11. 11. ~ 30. 실시설계

○ 2016. 12.  5. 특정제품 선정 심사위원회 개최

□  계획평면도

Ⅲ		공사 발주 계획

□  본 공사

○ 공사금액 : ***********

○ 공사기간 : 2016. 12. ~ 2017. 4. (착공일로부터 120일)

○ 추진방법 : 전자공개 수의계약

※ 공사금액이 소액이고 내년 봄 결혼식장 운영을 위하여 신속한 공사 추진이 필요.

○ 자격조건 : 건설산업기본법에 의한 조경공사업 면허를 보유한 업체로서 공고일 현재 주된 영업소가 서울시에 소재한 업체

※ 폐기물운반 처리포함 (100톤 미만)

□ 관급자재 구매

○ 조달청 3자 단가계약 : 수수료 별도 0.54%

- 파라솔 :************ (특정제품선정심사위원회에서 의결한 ****** 제품)

- 목재데크용 목재 : ********** (***************목재)

○ 별도구매 : 업체별 수의계약

- 가제보 : *********** (특정제품선정심사위원회에서 의결한*******제품)

‧ 계약심사 중으로 결과에 따라 금액 변경

- 야외테이블 셋트 : *********************************

- 하객용 테이블 : ***************************************

- 하객용 의자 : ***************************************

- 물품보관창고 : ********************************

Ⅳ		향후 계획

□ 2016. 12.  8.	공사발주 의뢰 및 조달 구매 의뢰

□ 2016. 12.  9.	기타 관급자재 구매 의뢰

□ 2016. 12. 20.	공사계약

□ 2017.  4. 20.	공사준공

붙 임 1. 설계도서 1부.

2. 공사설명서 1부.

3. 수의계약사유서 1부.

4. 공사용 자재 직접구매제도 발주부서 체크리스트 1부.

5. 청렴계약이행서약서 1부.  끝.