문서번호	교통행정과-61150
결재일자	2016.12.8.
공개여부	부분공개(5)

★주무관	교통시설담당	교통행정과장	안전건설교통국장
백성훈	임현주	이상수	12/08 박형중
협 조

삼선동 공영주차장 보수‧보강 공사 발주시행 기간 조정 보고

2016. 12.

성    북    구

교 통 행 정 과

삼선동 공영주차장 보수‧보강 공사

발주시행 기간 조정 보고

삼선동 공영주차장 보수‧보강 공사 발주시행과 관련하여 해당부서의 계약 및 공사 준공 등 연말 12월의 업무폭주 및 혹한기의 공사중단 등으로  아래와 같이 발주시행 기간조정에 대하여 보고합니다.

Ⅰ		주차장 보수․보강 개요

위 치 : 삼선동1가 278-5,6

규 모 : 면 적(946㎡), 주차면수 (21면)

보수․보강 범위

원앙빌라 석축경계 옹벽설치 L=24.3m, H=4.5m

- 암반천공(트리콘비트)H빔 식립

- L형 철근콘크리트 옹벽 설치(석축벽체 보강포함)

주차장 내부 배수로 설치 및 하부 포장공사

- 횡단하수거 등 설치44m(주택가 방류 우수차단)

- 주차장 하부 보수 ‧ 보강 배수로설치 및 포장 등

- 기타부대공사 카스토퍼설치, 차선도색 및 폐기물처리 등

사설위험시설물 국소적 위험해소 – 재능기부 공공기여

- 석축상단 노후 블록 담장 철거

- 철거구간 휀스 설치

총 공사금액 : 136,710천원

총 공사비 현황

구분		공사비
설계내역	도급비	122,228,000원 (폐기물처리 포함)
	이설비 및 기타	14,482,000원
	총공사비 합계	136,710,000원

예산과목 : 주차장 특별회계

Ⅱ		추진경위

2015.04.16. ~ 2016.08.01.

- 원앙빌라 축대 국소적 ․ 항구적 안전조치 요청 (4회) - 건축과

2016.07.04. : 삼선동 공영주차장 임시 폐쇄 결정 - 교통지도과

2016.09.02. : 안전건설교통국장 주재 대책회의 (위험축대 해소 방안)

(교통행정과, 교통지도과, 건축과, 도시안전과, 삼선동주민센터)

2016.10.07. : 부구청장 지시사항 관련 대책회의(건축과 안전조치 협조요청)

(교통행정과, 교통지도과, 건축과)

2016.10.10. : 원앙빌라 시설물 안전조치 요청(교통지도과→건축과)

2016.10.13. : 항구적 안전조치 교통지도과에서 검토요청(건축과→교통지도과)

삼선동 공영주차장 보수 ․ 보강 요청(교통지도과→교통행정과)

(삼선동 공영주차장 보수 ․ 보강 요청 후 추진사항 )

2016.10.18. : 삼선동 공영주차장 보수‧보강 공사 시행계획 방침                     ※ 구청장방침 교통행정과-49864(2016.10.18.)

2016.10.20. : 삼선동 공영주차장 보수‧보강 공사 설계용역 발주

2016.10.21. : 설계용역 계약 (설계용역착수 10.24.)

2016.11.22. : 공영주차장 보수‧보강 공사 설계용역 준공

2016.11.24. : 공사발주 계약심사 요청

2016.11.30 : 공사발주 계약심사결과 통보접수

2016.12.06. : 공사시행 발주(계약심사반영) 결재완료

Ⅲ		보고사항 및 처리의견

보고사항

삼선동 공영주차장 보수‧보강 공사 발주시행과 관련하여 해당부서(재무과)의 계약 및 공사 준공처리 업무 등이 연말 12월에 밀집(130여건 이상)되어 업무폭주로 인한 당월 발주건에 대한 처리 어려움의 의견과 혹한기 1월의 기온 강하시 주요공정에 대한 시공지연이 예상.

처리의견

상기사유와 같이 2016년 12월 발주에서 2017년 1월2일로 발주 시행기간을 조정하여 처리하고자 함.

Ⅴ		향후처리 일정

2017. 01.02. : 공사시행 발주

2017. 01.10. : 삼선동 공영주차장 보수‧보강 공사 계약

2017. 01.12. : 공사 착공

2017. 03월 : 삼선동 공영주차장 보수‧보강 공사 준공 및 운영

첨  부  1. 구청장방침 교통행정과-49864(2016.10.18.) 1부.

2. 기 발주 시행문 1부.

3. 주요공정 도면 1부.  끝.