문서번호		지역경제과-57094		★주무관		시장지원팀장		지역경제과장		기획재정국장
결재일자		2016.12.8.
				배태수		김순오		정길용		12/08 이상형
공개여부		대시민공개
				협 조
보도여부
	- 2016 수유재래시장 시설현대화 누수보수 공사 - 준공기한 연기보고
2016.12.8.
강 북 구

- 2016 수유재래시장 시설현대화 누수보수 공사 -

준공기한 연기보고

‘2016년 수유재래시장 시설현대화 누수보수 공사’ 관련하여 수유재래시장 민원 및

도급자 의견을 반영하여 검토후 아래와 같이 처리하고자 합니다.

2016.12.

보고자 지방행정주사보 배태수

강 북 구 청 장 귀하

공사개요

○ 공 사 명: 2016년 수유재래시장 시설현대화 누수보수 공사

○ 위    치: 강북구 도봉로67길 일대

○ 공사내용

- 수유재래시장 아케이드 누수보수(2,036㎡)

○ 도 급 비: 금43,563,060원(금사천삼백오십육만삼천육십원)

○ 도 급 자: ㈜건우구조엔지니어링

관련법규 및 근거

○ 지방자치단체 공사계약 일반조건 제26조(계약기간 연장)

○ 수유재래시장 민원으로 인한 누수보수 공사 변경 요청 공문 및 도급자의 공기연장요청 공문 참조

공기연장 사유

○ 수유재래시장 누수보수 공법 변경으로 인한 공사기간 연장 필요

○ 발주처 설계변경 요구사항 검토

처리의견

○ 공사기간을 8일 연기하여 당초 준공기한을 2016.12.11.에서 2016.12.19.로 연장 처리하고자 함

○ 시장상인회 의견을 반영하여 수유재래시장 누수보수공사관리에 철저를 기하고자 함

붙   임  수유재래시장 공사변경 요청공문 및 도급자의 공기연장 요청 각 1부.  끝.