함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경 시행에 따른 계약의뢰 (2016년 배수지․가압장 기계설비 수리 연간단가계약)

우리사업소에서 시행하고 있는 「2016년 배수지․가압장 기계설비 수리 연간단가계약」 관련하여 아래와 같이 설계변경 시행하고 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 사 업 명 : 2016년 배수지․가압장 기계설비 수리 연간단가계약

2. 계 약 자 : (주)에스피케이  대표 김권희

3. 계약기간 : 2016.05.03 ～ 2017.03.31

4. 변경사유 : 계약 물량 증․감 발생 등

5. 설계변경 내역

구 분	금 액 (원)		증․감 (원)	비 고
	변 경 전	변 경 후
총 금 액	57,351,000	57,186,580	감 164,420

6. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비(가압장‧배수지 등 시설물 유지관리),

수선유지교체비, 기타교체비

붙   임  1. 설계변경 시행문 1부.

2. 설계변경 심의위원회 결과보고서 1부.

3. 설계변경 사유서 1부.

4. 변경내역서 1부.

5. 설계변경 수량 증감내역서 1부.

6. 심의의견서 1부.

7. 설계변경 동의서 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	박병화		기전팀장	정임근		시설관리과장	12/08 최명익
협조자
시행	시설관리과-34432	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/
전화	3146-2816	/전송	3146-2839	/	bhpark@seoul.go.kr	/	부분공개(7)