문서번호	교통운영과-23609
결재일자	2016.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		교통개선팀장	교통운영과장
임홍필		이용구	12/08 강진동
협조
	주무관		박평근

도시고속도로 기능개선사업(2차) 기본 및 실시설계 설계변경 보고

2016.12

도시교통본부

(교통운영과)

설계변경(정산) 보고

도시고속도로 기능개선사업(2차) 기본 및 실시설계 용역과 관련하여 설계 지점 변경 등에 따른 설계변경(정산)을 보고함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 도시고속도로 기능개선사업(2차) 기본 및 실시설계

○ 용역규모 : 도시고속도로 교통체계개선 23개소, 21.06km

- 기본 및 실시설계 17개소, 8.46km

- 기본설계 6개소, 12.6km

○ 용역기간 : 2015.12. 21. ~ 2016.12.19

○ 용 역 비 : 191,345,000원

○ 용 역 사 : ㈜천일 대표 김석환

□ 설계변경내용                                             (단위 : 원)

구 분	계약금액(당초)	변경금액(변경)	증․감 금액	비 고
기본설계비	49,959,867	47,897,088	감2,062,779
실시설계비	33,103,444	32,735,954	감367,490
제경비	60,570,238	60,515,513	감54,725
기술료	23,126,818	23,099,445	감27,373
전력시설물 설계비	6,610,734	0	감6,610,734
손해배상보험료	578,899	582,000	증3,101
순원가	173,950,000	164,830,000	감9,120,000
부가가치세	17,935,000	16,483,000	감912,000
총용역비	191,345,000	181,313,000	감10,032,000

□ 설계변경 사유

○ 설계자문회의, 유관기관(구청, 경찰청 등) 협의, 민원발생에 따른 설계지점 변경

- 당초 : 기본 및 실시설계 17개소(8.46km), 기본설계 6개소(12.6km)

- 변경 : 기본 및 실시설계 17개소(8.53km), 기본설계 6개소(12.6km)

○ 전력시설물 설계 제외, 손해배상보험료 조정

□ 조치계획

○ 위 보고 내용대로 아래와 같이 설계변경 정산처리하고자 함

- 당초 계약금액 : 191,345,000원

- 변경 정산금액 : 181,313,000원(감10,032천원)

첨 부 : 1. 설계변경 요청공문 1부.

2. 설계변경내역서 1부. 끝.