문서번호	정수과-4431
결재일자	2016.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
김태현		장호	12/08 김형섭
협조

『정수처리시설 청소용역』

설계변경 심의회 개최결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

강북아리수정수센터

(정 수 과)

『정수처리시설 청소용역』

설계변경 심의회 결과보고

우리 센터 정수처리시설 청소용역에 대하여 설계변경 사항이 발생하여 설계변경 심의회를 개최하고 그 결과를 보고드림

□ 개    요

○ 용 역 명 : 강북아리수정수센터 정수처리시설 청소용역

○ 용역개요

- 주벽 청소 : 232,678㎡

- 슬러지 청소(침전) : 1,590㎥, 슬러지 청소(농축) : 3,530㎥

- 정수지 청소(주벽) : 16,673㎡,  정수지 청소(바닥) : 15,080㎡

- 상등수 이송 :  2회

○ 도급액

- 당 초 : 174,494,750원

- 변 경 : 165,354,090원(감9,140,660원)

□ 심의회 개최

○ 심의일시 : 2016. 12.  7.(수) 14:00～15:00

- 심의위원 : 권오정, 김석진, 하수용, 임태섭

- 심의내용

□ 청소용역을 수행함에 있어 계약물량과 시공물량의 일부 공종에 증가 사항이 발생하여 정산 및 사후정산 대상보험료 납입확인 후 정산설계변경 수행

□ 착수정 4개지 청소에 따른 주벽 및 슬러지 청소물량 증가

□ 물량변동사항

구 분		단위	당 초	변 경	증, 감
주 벽 청 소		㎡	232,678	234,422	증1,744
슬러지 청소	침전	㎥	1,590	1,707	증117
	농축	㎥	3,530	3,530	-
정수지 청소		㎡	31,753	31,753	-
상징수 이송		회	2	2	-

□ 심의결과

심의 검토사항	검 토 의 견
설계변경의 타당성	변경된 설계서 적정
단가 산출 적정여부	계약단가 적용
계약 변동(증․감)물량 계약단가 낙차율 적용범위(±3％)내 적용 적정 여부	적정
제경비 적정 산정 및 적용 적정성	제비율 검증 프로그램 확인
각종 제반규정 준수 여부	적정

따로붙임 : 1. 청소용역(설계변경) 검토의견서 4부.

2. 제비율검증 확인서 1부.

3. 정산설계변경 내역서 1부.  끝.