문서번호	시설보수과-10330
결재일자	2016.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
윤동원		박병연	12/08 김용제
협 조

설계변경(정산) 보고

(오목지하차도 관리실 출입구 변경공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

설계변경(정산)보고

(오목지하차도 관리실 출입구 변경공사)

공종별 물량 증·감 및 신규공종 발생에 따른 최종 설계변경 내역을 검토 정산처리하여 예산집행에 철저를 기하고자 합니다.

Ⅰ		공사개요

공 사 명 : 오목지하차도 관리실 출입구 변경공사

공사기간 : 2016.7. 25 ~ 2016. 12. 12

공사개요

- 출입구 구조물 지상시설물(3.0×7.6×5.2m) 최소화(2.3×1.6~4.4×2.6m)

- 변전실 지하화 이동설치(4.0×7.0×2.6m)

- 가시설(토류벽) 및 기타 부대공 1식

계 약 액(도급액) : 146,869,000원 (관급비18,957,000, 이전비 13,150,000 별도)

계 약 자 : 명남종합건설(주) 대표 박남재

Ⅱ		설계변경(정산) 검토보고

관련근거

-  시설보수과-8790호(2016.10.19.) : 현장 실정보고

-  시설관리처-9557호(2016.11.14.) : 준공기한 연기 검토보고

도급비 변경내용 : (감) 5,794천원

- 지장물 저촉 구조물변경 및 토공물량, 가시설물량 감소

- 기전분야(장비패드, 급기덕트) 요구사항 반영

- 주민요구사항(외부마감 및 수목식재) 반영

※ 신규공종은 낙찰율 적용

관급자재비(개질아스콘) 변경내용 : (감) 2,258천원

구 분		단위	당 초		변 경		증・감		비고
			수량	금 액	수량	금 액
레미콘	25-27-15	㎥	110	7,551,500	81	5,781,780	감)	1,769,720
	25-24-8	㎥	11	689,810	11	689,810		-
	25-18-8	㎥	6	336,420	6	349,800	증)	13,380
소 계				8,577,730		6,821,390	감)	1,765,824
철근	H22	톤	5.948	3,575,045	5.583	3,355,662	감)	219,383
	H19	톤	5.265	3,164,528	4.815	2,894,055	감)	270,473
	H16	톤	2.327	1,398,643	2.327	1,398,643		0
	H13	톤	3.527	2,138,631	3.527	2,138,631		0
소 계				10,276,847		9,786,990	감)	489,856
조달수수료		%	0.54	102,423		52,850	감)	2,647
합 계				18,957,000		16,699,000	감)	2,258,000

공사비 변경 내역

(단위 : 원)

구 분		당초계약	준공(정산)	증・감		비고
총 공 사 비		178,976,000	170,924,000	감)	8,052,000
도급비	공급가액	133,517,273	128,250,000	감)	5,267,273	물량증․감 및 보험료감액
	부가가치세	13,351,727	12,825,000	감)	526,727
	계	146,869,000	141,075,000	감)	5,794,000
관 급 비		18,957,000	16,699,000	감)	2,258,000	물량정산
이 전 비		13,150,000	13,150,000		-	폐기물처리등

※ 예산과목

- (2016예산) 도로시설과, 도로시설관리, 터널시설관리(도시개발특별회계), 도로시설물(터널,복개,지하차도,세척) 일상유지보수 : 137,000천원(No.43, No.44)

- 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리, 지하차도 노후배수시설 개량사업, 시설비 : 63,000천원(No.78)

Ⅲ		검토의견 및 조치계획

지장물 조사(줄파기) 결과 저촉하수관과 기존 가시설(SCW)로 인한 변경사항 반영

기전분야에서 요청한 수배전반 패드설치, 급기닥트 설치 등을 반영하고 지역주민들이 요청한 외부벽체 마감재 변경(목재패널 → 돌붙임) 및 관리실출입구 주변 화단조성사항 반영

기타 물량증감에 따른 정산반영

붙임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 관련 증빙자료 각 1부.  끝.