문서번호	주거환경개선과-13934
결재일자	2016.12.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주거환경정책팀장	주거환경개선과장
이정식		곽석권	12/08 박경서
협조

「이화충신권 성곽마을 성곽길 주변 정비사업 기본계획 및 기본설계용역」

준공기한 연기 검토보고

2016.  12.

도 시 재 생 본 부

(주거환경개선과)

「이화충신권 성곽마을 성곽길 주변 정비사업 기본계획 및 기본설계용역」

준공기한 연기 검토보고

｢이화충신권 성곽마을 성곽길 주변 정비사업 기본계획 및 기본설계용역 ｣ 관련 관계부서 의견청취 및 재생사업에 대한 주민거부감 해소 등을 위한 절차이행을  위해 용역기간을 연장하여 사업 추진코자 함

Ⅰ		용역 개요

❍ 용 역 명 : 이화충신권 성곽마을 성곽길 주변 정비사업 기본계획 및 기본설계 용역

❍ 계약기간 : 2016.2.19. ~ 2016.12.19.

❍ 용 역 비 : *********

❍ 용역업체 : ***************

❍ ’16.02.19	: 용역계약 체결
❍ ’16.03.07	: 제1차 전문가 자문회의 (착수보고)
❍ ’16.04.	: 이화마을 벽화훼손사건 발생
❍ ’16.06.08	: 제2차 전문가 자문회의 (중간보고)
	- 흥인지문, 창신동구간까지 범위를 확대하여 검토 - 순성길 내 주차처리를 위한 T/F팀 구성 등 검토 - 낙산 성곽길 인접 건물 디자인가이드라인도 필요 등
❍ ’16.08.19	: 설계 변경 (용역기한 2개월 연장 : 당초 8.19⇢10.19)
❍ ’16.09.21	: 한양도성자문위원회 사전 자문
	- 한양도성 주변 마을 성곽길 정비계획의 첫 사례이므로 향후 유사지역 기본방향이 될 수 잇도록 세부적인 계획을 수립하여 재자문 바람
**********	***************

Ⅱ		추진 경과

Ⅲ		계약 변경사항

❍ 계약변경 내용

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
용역기간	’16.2.19~’16.12.19	’16.2.19~’17.2.28	2개월 9일 연장
용 역 비	*********		변경 없음
용역업체	******************		변경 없음

❍ 용역기한 연장사유

- ********************************************************************************************************************

- ************************************************************************************************************

- ********************************************************

□ 향후계획 : 재무과에 용역계약 변경(연장) 의뢰

붙임   1) 준공기한 연기의뢰서 1부.

2) 관련공문 및 합의각서 각 1부.  끝.