투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	준공기한 연기의뢰(동부간선도로확장(3공구) 통신공사-3차)

우리 본부에서 시행 중인「동부간선도로확장(3공구) 통신공사-3차분」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 동부간선도로확장(3공구) 통신공사-3차분

2. 계 약 자 : 이엔트컴(주)  대표 백석환

3. 계약변경 내용                                            (단위:원)

구 분		당 초	변 경	비고(증,감)
총차	도급비	37,125,000	37,125,000	변경없음
	공사기간	2015.05.01~2017.12.31	2015.05.01~2017.12.31	변경없음
3 차	도급비	25,091,000	25,091,000	변경없음
	공사기간	2016.01.20~2016.12.10	2016.01.20~2017.01.31	증 52일

4. 연기사유 : 선행공정(토목) 지연에 따라 공정에 맞춰 공기연장.

5. 지체상금 부과여부 : 미부과

따로붙임  1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 합의서, 예정공정표  각 1부.  끝.

	설비부장
주무관	김원태		시책사업과장	임현근		설비부장	12/08 권오식
협조자	경리과장	최정수
시행	설비부-19226	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	대시민공개