문서번호	소방행정과-3454
결재일자	2014.3.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
한기응	양철근	박희순		03/19 황인환
협 조

창동119안전센터 태양광발전장치 설치 계획

- 에너지절약 및 효율적 사용을 위한 -

도 봉 소 방 서

(소방행정과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 ■	(		)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	지방자치단체를상대로하는 계약에관한법률	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

- 에너지절약 및 효율적사용을 위한 -

창동119안전센터 태양광 발전장치 설치계획

에너지 사용량이 많은 창동119안전센터에 신재생에너지인 태양광발전장치를 설치하여 에너지를 절감하고 효율적으로 사용하며, 친환경 조성을 위한 온실가스(co2) 배출량 감소와 원전하나 줄이기 종합대책에 기여하고자 함.

Ⅰ		추진근거 및 배경

□ 서울시 녹색에너지과-1407(2014.01.23.)호『신재생에너지 선정결과』

□ 서울시장방침 제 143(2012.05.08.)호『원전하나 줄이기 종합대책 』

□ 신재생에너지 사용으로 서울시 녹색환경 만들기 적극 동참

□ 청사내 태양광 설치공사를 통한 에너지 절감

Ⅱ		건물 및 전기시설 현황

□ 건물현황

건물준공	층수	건물 연면적	비고
1998. 8	지하1층, 지상2층	735.45㎡

□ 전기시설물 현황

전기시설 계약용량	연간(2013년) 전기사용량	주요 전력소비 시설
18kw	27,575 kw/h	- 24시간 전등사용, 동절기 전열기구 하절기 냉발기구, 소방장비 및 기구

◈ 2013년도 1일평균 전력사용량 : 57.54kw(월 평균 1,726.2kw 사용)

Ⅲ		태양광 발전장치 설치계획

□ 추진개요

□ 추진기간

- 조달발주 : 2014. 3월,  설치공사 : 2014. 4 ～ 5월

□ 예 산 액 : 39,600천원(감리비 1,940천원 포함)

- 예산과목 : 에너지절약, 신재생에너지보급, 시설비․감리비

□ 발주방법 : 조달청 다수공급자(MAS)계약

□ 설치용량 : 태양광 전지 3kw × 3개 = 9kw/h

- 1일 평균 3.2시간 ×9 kw = 28.8kw전력생산

- 월 평균 전력생산량 1일28.8kw × 30일 = 864kw/h

☞ 2013년 월 평균 1,726.2kw 사용의 약 50% 생산가능함

□ 설치기준 : 서울시 태양광에너지 보급설치 및 관리지침의 규정에         적합하게 설치

□ 설치장소 : 창동119안전센터 옥상

□ 태양광발전장치 설치

□ 태양광발전이란

태양광 발전은

태양광을 직접

전기에너지로

변환시키는 기술

태양광

이용기술

태양광발전시스템

태양전지로 구성된 모듈과 축전지, 전력변환장치로

구성됨

전력생산

□ 태양광발전장치 구성

- 태양광 모듈(3㎾)×3개, 지지대 3개, 인버터, 모니터링 1대, 전기배선          및 접속함, 역전류방지 다이오드 등

- 태양광전지판 설치 현황

옥상 지지대 설치	태양광 전지판

□ 태양광발전장치 납품 및 설치 방법

- 태양광 설비 일괄 제작 납품 설치

- 분전반 연결 전력 동선 일괄 설치

- 태양광 설치 적정 유무 확인 가능한 감리업무

- 기타 태양광 설치로 인한 부대적인 업무 처리 등

□ 신재생에너지 태양광 설치 감리용역

□ 예 산 액 : 1,940천원

□ 발주방법 : 태양광시설 설치 감리 전문업체

□ 감리업무 주요내용

- 서울시 태양광에너지 보급 설치 및 관리지침의 규정에  적합하게

설치여부

- 설치규격, 장비, 동력간선 시설 설치에 대한 적정여부 등

□ 태양광발전장비 설치계약

□ 계약방법 : 조달청 다수공급자계약

- 근거 : 다수공급자업무처리규정(조달청훈령 제1622호, 2013.09.23)

제40조 ②항 수요기관의 요청이 있을 경우에는 납품요구 대상 계약상            대자가 중소기업이고, 1회 납품요구 대상 금액이 1억원 미만이면 제안            요청 없이 바로 구매가능

□ 추진절차

- 예산 재배정요청(3월) → 조달요청 발주(4월) → 제조 납품 및            검수(4월) → 태양광 설치시행(4월～5월) → 준공 및 검수(5월)

붙임  1. 과업지시서 및 규격서 각 1부

2. 서울시 태양광에너지 보급 및 관리지침1부.  끝.